문서번호	공원여가정책과-10799
결재일자	2023. 8. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원협력팀장	공원여가정책과장	푸른도시여가국장
조현	박정옥	김인숙	08/14
			代김인숙

2024년 세출예산 편성을 위한

권역별 거점형 어린이놀이터 조성 추진계획

2023. 08. 14. (월)

푸른도시여가국

(공원여가정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

목    차

1.	개요 및 실적	1
2.	2024년 추진계획	2
3.	향후계획	2
	붙임 *** 사업대상지 위치도 및 현황사진	3

2024년 세출예산 편성을 위한

권역별 거점형 어린이놀이터 조성 추진계획

공원여가정책과장 : 김인숙☎2133-2010 공원협력팀장 : 박정옥☎2035 담당 : 조 현☎2020

'권역별 거점형 어린이놀이터 조성' 관련, 동북권(북서울꿈의숲) 공사 및 ******************************을 위한 추진계획 보고

Ⅰ		개요 및 실적

□ 사업개요

ㅇ 대    상 : 시공원 등

ㅇ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.

ㅇ 사 업 비 : 9,000백만원

ㅇ 사업내용 : 어린이들의 다양한 모험 및 연령·장애 통합 놀이공간 조성

< 연차별 사업계획 >

구 분	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
사업비 (백만원)	9,000	900	2,000	2,000	2,000	2,100
대상지	5대권역	동남권 (광나루 한강공원)	서남권 (보라매공원)	동북권 (북서울꿈의숲)	*** ********	*** ********

□ ’23년 추진실적

ㅇ 서남권 놀이터(보라매공원, 15,000㎡) 설계 추진 중

- 도시공원위원회 심의 완료, ’23.8월 설계완료

- ********************************

ㅇ 동북권 놀이터(북서울꿈의숲, 8,340㎡) 설계공모 재공고 추진 중

- '23.7월 본공고 결과(당선작없음)에 따라 재공고(8.4.), 10월 작품선정 예정

- ******************************************

Ⅱ		2024년 계획

□ 추진개요

ㅇ 대    상 : 2개소(동북권 및 ***)

- 동북권 : 북서울꿈의숲(동문 사슴사육장 옆 야생초화원 및 계절수목원 부지)

- ********************************

ㅇ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

ㅇ 사 업 비 : *****************************

- 동북권 공사비 등 : 1,739백만원(시설비 1,736 / 시설부대비 3)

- ******************

※ ********************************************

ㅇ 사업내용 : 동북권 공사 및 *********

□ 예산편성안 및 추진일정

대 상 지	편성요청액	추 진 일 정
계	********	동북권 공사 및 도심권 설계
동북권 북서울꿈의숲	1,739백만원 (시설비 1,736, 시설부대비 3)	· '24. 4. 설계완료, 공사발주 · ’24. 5. ~ 10. 공사시행, 안전검사 · ’24. 11. 놀이터 개장
**********	*********** *********************	· '24. 1. ~ 3. 공모계획 수립 · ’24. 4. ~ 7. 공모시행, 당선작 선정 · ’24. 8. ~ 12. 설계시행

Ⅲ		향 후 계 획

□ **************

ㅇ ******************************************

□ *****************************

붙 임	*** 사업대상지 위치도 및 현황사진

**************************************************************************