아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(통신분야 건설사업관리기술인 배치계획 변경 승인 통보(서울어울림체육센터 건립공사))

1.업무지시현장 : 서울 어울림체육센터 건립공사(장기1차) 엘앤케이경원건설(주), 서울

어울림체육센터 건립공사(장기1차) (주)코원건설, 서울 어울림체육센

터 건립공사(장기1차) 주식회사 종합건축사사무소가람건축, 서울 어울

림체육센터 건립공사(장기1차) (주)토문엔지니어링 건축사사무소, 서

울 어울림체육센터 건립공사(장기1차) 주식회사 신한종합건축사사무소

, 서울 어울림체육센터 건립공사(장기1차) 지산토건(주)

2.작 성 일 자 : 2023-08-14 14:08:13

3.지 시 내 용

가. 토문 제2023-1337호(2023.8.8.)와 관련됩니다.

나. "서울어울림체육센터" 통신 상주 기술인의 배치계획 변경을 아래와 같이 승인하오니, 공정관리에 만전을 기해주시기 바랍니다.

ㅇ 건설사업관리기술인 배치계획 변경 승인 내역   ※ 배치기간 승인함

구분	기준	변경 전			변경 후			비 고
		등급	성명	배치기간	등급	성명	배치기간
통신 (상주)	중급	-	000	'23.8.19. ~'25.7.1.	-	000	'23.12.17.~'25.7.1.
통신1 (상주)	중급	-	000		-	000	'25.3.3. ~'25.7.1.

ㅇ 사유 : 공사지연에 따른 기술인 배치계획 조정.  끝.

주무관	윤별		환경설비과장	08/14
김현기
협조자
시행	설비부-12404	(	2023. 8. 14.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 빌딩 15층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2321	/전송	02-6438-2399	/	yunstar@seoul.go.kr	/	부분공개(5)