문서번호	기전과-8349
결재일자	2023. 8. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
조소현		이래운	08/14
			채충일
협조
	주무관		이정준

대방지하차도 전기실 지상화 추진 계획(변경)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 8.

남부도로사업소

(기 전 과)

대방지하차도 전기실 지상화 추진 계획(변경)

대방지하차도 전기실 지상화 추진 계획에 변경 사항이 발생하여 이를 보고하고 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

ㅇ 대방지하차도 전기실 지상화 추진 계획(기전과-7537, '23.7.26.)

ㅇ 조달청 내자구매업무 처리규정(조달청훈령 제2082호, '23.1.20.)

- 제22조(조달요청서의 반송)제3항 추정가격 1억원 이하의 소액인 경우

□ 추진현황

ㅇ 2023. 3. 27. : 실시설계용역 추진

ㅇ 2023. 6. 22. : 국유재산 사용 허가 통보(국가철도공단→기전과)

ㅇ 2023. 6. 23. : 실시설계용역 완료

ㅇ 2023. 7. 06. : 도로점용허가 처리 통보(영등포구청→기전과)

ㅇ 2023. 7. 26. : 대방지하차도 전기실 추진계획 수립

ㅇ 2023. 8. 10. : 전기공사 발주

ㅇ 2023. 8. 10. : 관급자재(수배전반) 발주

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명: 대방지하차도 전기실 지상화

ㅇ 사업목적: 지하차도 침수방지 등 안전사고 예방

ㅇ 사 업 비: ********

ㅇ 사업기간: 2023. 9. ~ 12.(4개월)

ㅇ 주요 사업내역

구 분		**** *****	주요 공정
계		*******
전기공사	도급비	***	패드작업, 간선공사, 수배전반 설치
수배전반	관급비	**	동력반, 조명반 CCTV 및 자동제어외함
자동제어반	관급비	**	자동제어속판 PLC 프로그래밍 및 시운전
통신장비 지상이전 작업	이설비	*	CCTV장비 이설

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 지하차도노후배수시설개량, 시설비

□ 변경사항

******************************

*****************

********************************************

****************************************************************************************

□ 향후계획

ㅇ 2023. 8. : 계약심사 및 관급자재 구매 계약의뢰

붙임  1. 대방지하차도 전기실 추진계획 1부.

2. 관련법규·규정 각 1부.  끝.