문서번호	문화재관리과-11256
결재일자	2023. 8. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한양도성관리팀장	문화재관리과장
강남규		이승철	08/17
			김건태
협 조

『북한산성 보국문․대동문 해체보수공사』

설계변경 검토보고

2023. 08.

문 화 본 부

(문화재관리과)

『북한산성 보국문․대동문 해체보수공사』

설계변경 검토보고

문화재관리과장 :김건태☎2133-2650 한양도성관리팀장 : 이승철☎2659 담당 : 강남규☎2662

「북한산성 보국문․대동문 해체보수공사」와 관련하여 문화재청 문화재수리 설계변경승인을 받은 사항에 대해 계약변경 및 공사재개하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

□ 관련근거

○ 설계변경 제출(시공자) : 주식회사 일토종합건설 일토 2023-056호 (’23. 7. 31.)

○ 기술검토 의견서(감리자) : 주식회사 이상건축사사무소 20*******1(’23. 8. 2.)

○ 문화재청 설계변경승인 : 문화재청 문화재관리과-10871호(’23. 8. 8.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 북한산성 보국문․대동문 해체보수공사

○ 공 사 비 ***********************************

○ 공사기간 : ’22. 5. 20. ~ ’23. 6. 30(공사중지중)

○ 시공자(문화재수리업자) :*******************

○ 감리자(문화재감리업자) : *********

○ 공사내용

- 보국문 : 성돌해체보수, 배수로, 위험수목정비 등

- 대동문 : 초석위 문루 해체 후 재설치

□ 추진경위

○ ’21. 11. 22. : 문화재수리 설계승인

○ ’22.  5. 20. : 공사착공

○ ’22.  9. 26. ~ 23. 5.30. : 전문가 자문회의(3차례)

○ ’23.  6.  9. ~ : 공사중지 및 설계변경안 작성

○ ’23.  8.  8. : 문화재수리 설계(변경)승인

Ⅱ		설계변경 주요내용

□ 설계변경 추진개요

○ 관계전문가 자문회의 내용

- 2022.9.26.: 관계전문가 1차 현장 자문회의**********

*******

****************************************************

***************************************

**********************************

- 2023.3.6.: 관계전문가 2차 현장 자문회의**********

*******

***************************************************

*************************************

*******

******************************************************

- 2023.3.6.: 관계전문가 3차 현장 자문회의**********

*******

*********************************

*******

****************************************************

○ 주요 변경내용

내 용	금 액	비고
*****************	*******
******************	*******
****************	*******
******	*******

○ 설계변경 내용

구 분	변경 전	변경 후	증 감
총 공사비	***************	***************	**************
공사기간	******************	*******************	******

Ⅲ		사안별 세부 검토내용

○ 대동문 해체결과 기존 노후된 부재의 재사용이 어려우므로 교체

- ****************************************

*	*	*
******	**********	*****

- ************************************

*	*	*
********		********

- ******************************

○ 보국문 상부 마감 및 내측 계단 복원

-*******************************************

- **********************

*********	********	************

○ 공사기간 연장

- 시공물량 증가 및 공사중단기간에 따른 공사기간 연장

Ⅳ		처리 의견

□ 공사 설계변경 적정

○ 감리자 의견 [감리: 이상 건축사사무소]

- 발주부서 설계변경 요청사항에 따른 시공사 의견 검토 결과 타당함

○ 1,2,3차 자문 의견에 따른 설계변경 사항 및 문화재청의 설계 승인 받은 사항으로 계약금액 조정 및 공사기간을 연장하고 공사재개함이 타당함.

□ 감리기간 연장 필요

○ 상기 설계변경으로 인한 공사기간 연장에 따라 감리기간 연장처리

구 분	변경 전	변경 후	증 감
총 용역비	************	************	****
용역 기간	******************	*******************	******

□ 낙찰차액 사용

○ 설계변경으로 인한 추가 공사예산은 시설비 낙찰차액 활용

- 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존․관리, 한양도성 보존․정비, 북한산성 보수․보존, 시설비

붙 임  1. 감리자 검토의견서  1부

2. 시공자 실정보고서(별도첨부) 1부

3. 변경내역 상세 1부

4. 내역서 및 산출서 1부.

5. 준공기한 연장보고서(시공자, 감리자) 각 1부.  끝.