아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)유신
(경유)
제목	용역 재개 및 용역기간 변경 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부와 계약 체결 후 중지된 「탄천·한강변 정비 및 탄천보행교 신설 기본 및 실시설계 건설사업관리(설계감리)용역」이 기본설계가 완료됨에 따라,

3. 실시설계 추진을 위하여 아래와 같이 용역 재개 및 기간 변경(연장)되었음을 알려드리오니 과업수행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

◎ 아  래

구 분	계약자	중지 기간	용역기간
			당초	변경	비고
건설사업관리용역	㈜유신 외 2	'21.08.02.~ '23.08.08. (재개일 : '23.08.09.)	'20.10.27.~ '22.08.12.	'20.10.27.~ '23.11.08.	기간 연장

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박성준		토목설계과장	代김경수		토목부장	전결 08/17
代최진우
협조자
시행	토목부-15241	(	2023. 8. 17.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 청계청사 12층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2155	/전송	02-6438-2199	/	ch83895@seoul.go.kr	/	부분공개(5)