문서번호	도시철도토목부-9966
결재일자	2023. 8. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
장대성		박형복	08/18
			윤병헌
협 조
	주무관			김봉성

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

횡갱 집수정 진입로 반영 관련 실정보고 검토

2023. 8

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

횡갱 집수정 진입로 반영 관련 실정보고 검토

건설사업관리단으로부터 제출된“횡갱 집수정 진입로 반영 관련 실정보고”건에 대한 검토보고임.

※ 관련서류 : 동명감 진접1 제2023-318호(’23.08.17)

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

ㅇ 공사계약일반조건 제6절(공사 설계의 변경)의1. 가의 1)항

- 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 등

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

ㅇ 공사금액 : 108,680백만원 (6차공사 17,000백만원)

ㅇ 공사기간 : ’18.12.31.∼ ’26.02.28. (6차공사 ’23.4.1.∼’23.12.31.)

ㅇ 규    모 : 인입선(L=5,556m), 차량기지 113m

ㅇ 도 급 자 : ㈜케이씨씨건설

□ 추진경위

ㅇ '23.06.02 : 횡갱 집수정 시공계획서 제출

ㅇ '23.07.06 : 원설계자 의견 요청 및 회신

ㅇ '23.07.27 : 공사관리관 협의 및 원설계자 의견 보완

□ 건설사업관리단 보고내용

ㅇ 실정보고 사유

- 횡갱 하부 집수정 굴착공사와 관련하여 횡갱에서 집수정 바닥까지 장비 진입로가 필요함에 따라 진입로 조성 및 철거비 반영 필요

ㅇ 변경 현황

구 분	당 초		변 경		증 · 감
집수정 진입로	정밀 진동제어 발파 소규모 진동제어 발파 버력처리 스마트송장/발생암매각 콘크리트 타설	- - - - -	정밀 진동제어 발파 소규모 진동제어 발파 버력처리 스마트송장/발생암매각 콘크리트 타설	74M3 147M3 221M3 221M3 221M3	증) 74M3 증) 147M3 증) 221M3 증) 221M3 증) 221M3

ㅇ 단가 적용 현황

- 기존내역 물량(소규모 진동제어 발파, 버력처리 등) 증·감에 대해 기계약단가 적용

- 정밀 진동제어 발파는 신규단가 적용
☞ 시공비는 표준시장단가 적용, 화약자재비는 협의율(87.703%) 적용

공 종 명	규 격	단위	적 용 단 가(단위:원)		비 고
			설계가	적용단가
흙깎기공	정밀 진동제어 발파	m3	32,323	31,562	시공비 : 표준시장단가(100%) 적용 화약자재비 : 협의율(87.703%) 적용

ㅇ 공사비 증 · 감 현황

(단위:천원)

구 분	공 종	공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 · 감
터 널	집수정 진입로 조성/철거	-	******	********
▸직접공사비 계		-	******	********
▸제 경 비		-	*****	********
▸제경비 제외공종(P.S)		-	****	********
▸물가변동비(K1~K6)		-	*****	********
▸공 급 가 액		-	******	********
▸부 가 가 치 세(영세율)		-	*	*
▸도 급 액 계		-	******	********
▸관 급 자 재 비		-	******	********
▸총 공 사 비		-	******	********

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- 집수정 진입로 반영 건에 대해 공사계약 일반조건 제20조에 의거 변경되는
공사비************는 추후 설계에 정산 반영함이 적정함.

□ 원설계자 검토의견

ㅇ 시공사에서 제시한 경사로 설치계획, 콘크리트 되메움 계획 및 제어 발파계획은 부등침하 방지와 장비운용, 절리 확장방지를 고려한 적정한 계획으로 판단됨.

□ 조치의견

ㅇ 건설사업관리단의 “횡갱 집수정 진입로 반영 실정보고” 건에 대해 검토한 결과 적정한 것으로 판단되므로 승인 통보

ㅇ 향후 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 정산·반영하여 사업추진에 만전을 기하고져 함.

붙 임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝.