의원 요구 자료 제출

시 행	문화시설과-6935	(	2023. 8. 21.	)
접 수		(		)
결재일자	2023. 8. 21.
공개여부	부분공개(5)
수 신 자	수신자 참조
수신자	기획담당관, 문화정책과장

주무관	문화시설3팀장	문화시설과장	문화본부장		결재
김한종	최우진	황승일	08/21
			최경주
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 2004번, 진성준의원, 정무위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

진성준 국회의원(환경노동위원회,더불어민주당, 강서구을)

□ 요구번호 : 2004

□ 요구내용 : 서울시 강서구 사업진행 현황

1. 마곡시립도서관 건립 계획 및 추진일정

1. 의원님께서 요청하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 강서구 내발산동 743(면적 : 10,017㎡)

ㅇ 규    모 : 건축면적 2,941㎡/연면적 12,004㎡(지하1층, 지상3층)

ㅇ 복합 조성(안) : 총 12,004㎡(도서관 5,338㎡, 생활체육시설 5,277㎡, 키즈카페 1,389㎡)

ㅇ 사 업 비 : 936억원

ㅇ 사업기간 : ’19. ~ ’29.

□ 추진경과

ㅇ ’19. 12.~’20. 6.	타당성조사 용역

ㅇ ’20. 1.30.	기본 계획 수립

ㅇ ’20. 4.~12.	행안부(LIMAC) 타당성 조사

ㅇ ’21. 5. 27.	시투자심사(결과: 조건부 추진)

ㅇ ’22. 9.~12.	복합시설조성을 위한 타당성 및 기본계획 연구 용역

ㅇ ’23. 2. 26.	서서울 문화플라자 조성 기본계획(안) 수립

ㅇ ’23. 6.	행안부(LIMAC) 타당성 조사

□ 향후계획

ㅇ ’24. 3.	시 투자심사

ㅇ ’24. 6.∼ 9.	공유재산 심의·관리계획

ㅇ ’25. 1.∼’26. 7.	국제설계공모, 기본 및 실시설계

ㅇ ’26. 8.∼’29.12.	착공 및 준공

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	문화본부 (문화시설과)	담당사무관	최 우 진
	☎2133-4216	주무관	김 한 종
	작 성 일 : 2023. 8.21.