문서번호	방재시설부-10029
결재일자	2023. 8. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김광호		정현중	08/21
			이동훈
협 조
	주무관			김재웅

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

교통전환 시설물 추가설치 실정보고

2023. 8.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

교통전환 시설물 추가설치 실정보고

국회대로 지하차도 및 상부공원화 사업의 교통전환(본선차로 축소 8 → 6차로 등)계획에 따라 교통 안전시설물 등을 변경 설치하고 그 결과를 보고 드림

※ 관련문서 : 이산2023-국회대로(건)-215호(2023. 8.18.)

Ⅰ		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사

ㅇ 위    치 : 양천구 신월IC ~ 화곡 지하차도 BOX 시점

ㅇ 사업규모 : 도로연장 1.22km, 왕복4차로 (지하차도 신설 995m)

ㅇ 공사기간 : 2018. 8. 8. ~ 2024. 12. 31. (착공일로부터 77개월)

ㅇ 도 급 비 : 91,827백만원

ㅇ 시 공 사 : 한신공영(주) 외 1개사

ㅇ 건설사업관리단 : ㈜이산 외 3개사

Ⅱ		추진현황

ㅇ '22.02.11. : 도로점용공사장 교통소통대책 변경수립(2차) 및 심의완료

ㅇ '22.09.    : 교통소통 자문회의 실시(1차 '22.09.15, 2차 '22.09.29.)

ㅇ '22.10.16. : 교통처리 시행

- 화곡지하차도 폐쇄, 본선 차로축소(8차로 → 6차로), 화곡사거리 좌회전금지

ㅇ '22.10.17. : 화곡고가사거리 U턴 금지(여의도 → 인천방향)

ㅇ '22.10.19. : 본선외 구간 차로조정 시행

- 남부순환로 차로조정 시행 (서서울호수공원 앞 교차로 U-TURN 차로 설치, 신월I.C교 상부 차로재배치)

ㅇ '22.10.24. : 국회대로 2-1공구내 U턴차로 설치

ㅇ '22.10.27. : 본선외 구간 차로조정 시행

- 중앙로 차로재조정 및 U-턴차로 설치

ㅇ '22.10.27. : 교통소통대책 모니터링 시행/결과(2차) 보고

Ⅲ		실정보고 검토내용

□ 교통전환 안전시설물 등 설치 내용

ㅇ 지하차도 공사 본격 추진('22.10)에 따라, 차로 축소(8차로→6차로) 운영, 화곡

지하차도 폐쇄 등 교통처리계획을 반영하여 교통소통대책 변경 심의를 득함.

ㅇ 교통심의·본부 자문회의·경찰서 요청사항 등 국회대로 본선구간 뿐만 아니라

본선과 연결된 도로 및 교차로 등에 대해 교통전환 안전시설물, 차선도색,

미끄럼방지포장 등 교통시설물을 변경(추가) 설치함.

ㅇ 교통전환 단계별 현황

구 분		교통전환 단계현황
본선구간	교통심의 자문회의	당초	12단계	-		13단계∽16단계
		변경	12단계	13단계	15단계	16단계∽19단계
				교통전환 단계추가 (차로조정 8→6차로)
본선 외 구간	자문회의	-		남부순환로 차로조정(2개소) 중앙로 차로조정(1개소)		-

ㅇ 교통전환 주요내용

구분	교통전환 평면도	교통전환 내용
12단계 [당초]		-
		‧ 제물포터널 개통에 의한 교통변환시행 (8차로) - 방호벽 이동설치(PC/PE) 및 차선도색
13단계 [추가] (8차로)
		‧ 화곡지하차도 폐쇄에 의한 교통전환시행 (8차로 ⇒ 6차로) - 방호벽 이동설치(PC/PE) 및 차선도색 - 미끄럼 방지포장 및 배너설치 ‧ 남부순환로(2개소) 및 중앙로(1개소) 차로조정 - 차선도색(5종)
15단계 [추가] (6차로)
		-
16단계 [당초 13단계]

ㅇ 교통소통대책 반영 내역

교통시설물 등 반영 내역			수 량			비고
			당초	변경	증 (감)
1. 교통심의 반영사항	교통전환 (안전시설물)	PE방호벽 구입(개)	483	1,366	883
		PE방호벽 이동설치(개)	3,511	8,014	4,503
		PC방호벽 구입(개)	1,090	1,090	0
		PC방호벽 이동설치(개)	9,032	10,865	1,833
	임시 차선도색 및 제거 (본선+신월IC 진입로)	페인트형 도색(㎡)	5,769	8,712	2,943
2. 자문회의 반영사항	홍보시설	배너(개)	-	700	700
		현수막(개)	28	68	40
		공사중 안내표지판(개)	77	137	60
	차선도색 5종(*신규 구간) 차선도색 5종 제거 (신규 및 *기존 구간)	5종 도색(㎡)	-	1,309	1,309
		5종 제거(㎡)	-	1,704	1,704
3. 경찰서 요청 반영사항	미끄럼방지포장 (복공판 상부)	전면식/1-2방식(㎡)	22,983	25,503	2,520
	과속카메라설치 (시점부 국회대로 본선 위치)	과속단속	-	-	-	경찰서 협의중
4. 기타사항	기타 교통안전 시설물	(윙카 ,교통시설물 파손/교체 외) (식)	-	1	1

* 차선도색 5종 (신규구간) : 남부순환로 및 중앙로 차로조정 구간

차선도색 5종 (기존구간) : 신월여의지하도로 진출입부 등

ㅇ 공사비 증감 내역                                              (단위: 원)

구 분	금 액			비 고
	당 초	변 경	증 (감)
직 접 비	2,506,321,299	3,354,596,096	848,274,797
간 접 비	1,545,678,701	1,972,203,904	426,525,203
공급가액	4,052,000,000	5,326,800,000	1,274,800,000
V.A.T	405,200,000	532,680,000	127,480,000
도급공사비	4,457,200,000	5,859,480,000	1,402,280,000
총 공사비	4,457,200,000	5,859,480,000	1,402,280,000

Ⅳ		조치계획

ㅇ 화곡지하차도 폐쇄 및 본선 차로 축소(8 → 6차로)계획 등을 반영하여 교통전환 시설물을 변경(추가) 설치후 교통소통 모니터링을 실시한 결과, 교통상황이 안정화되어 시설물 설치비용을 도급비에 반영코자 하며

ㅇ 본 건은 시공사 귀책에 해당되지 않아 시공사는 신규단가(100%) 적용 요구하는 바, 관련 규정에 따라 단가 협의하고 그 결과를 반영하여 추후 설계변경 시행코자 함.

※ 협의가 이루어지지 않을 시「지방자치단체 입찰집행기준」제9장 계약일반조건제7절 계약금액의 조정에 따라 강제협의율[(신규100%+낙찰율)/2]을 적용

붙임 :  감리 실정보고서 1부.  끝.