문서번호	기전설비과-7740
결재일자	2023. 8. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
김상신		윤양호	08/21
			代김형준
협 조

강북정수센터 수전전압 변경공사

착공보고회 개최결과

2023. 8. 18. (금)

상수도사업본부

(생산부 기전설비과)

강북정수센터 수전전압 변경공사

착공보고회 개최결과

생산부장 :어용선☎3146-1301 기전설비과장 : 윤양호☎1310 담당 : 김상신☎1332

「강북정수센터 수전전압 변경공사」착공보고회 개최결과 및 향후계획을 보고드림.

□ 사업개요

ㅇ 사업기간 : ’22.01. ~ ’24.06.('22년 : 설계, '23. ~ '24년 : 공사)

ㅇ 사 업 비 : 5,449백만원

ㅇ 사업내용

- 수전전압 변경(154kV→22.9kV)에 따른 수전선로 2회선 교체(주1 예비1)

- 수전용량 증설(15,000kW→20,000kW), 주전기실 수배전반 및 전력간선 교체

- 수전동 및 주전기실 건축리모델링(창호, 전기실 바닥, 등)

주변압기(M.TR)	주차단기(GIS)	주전기실(송수펌프동)

□ 추진경위

ㅇ ’21.12. : 2040 수도정비기본계획 수립(환경부 승인)

ㅇ ’22.04. : 현장조사 및 한전 남양주지사 방문 및 협의

ㅇ ’22.10. : 건설기술심의(설계심의) 위원회 개최

ㅇ ’22.12. : 설계용역 준공

ㅇ ’23.04. : 전기공사 계약(미호전공외 1개사)

ㅇ ’23.06. : 감리용역 계약(한국엔지니어링)

ㅇ '23.06. : 한전 남양주지사 전기사용신청

ㅇ '23.07. : 관급자재(배전반, 변압기, 전력감시제어) 발주 및 계약

□ 착공보고회 개요

ㅇ 일    시 : '23. 8. 9.(수) 16:00

ㅇ 장    소 : 강북정수센터 본관 1층 회의실

ㅇ 보고내용 : 강북정수센터 수전전압 변경공사 착공보고

- 수전전압 변경공사 개요

- 공사추진체계(시공사, 관급자재, 감리단) 및 공종별 공사일정

ㅇ 보 고 자 : 한국엔지니어링 책임감리원

ㅇ 참 석 자 : 총15명

- (본  부) 생산부장, 기전설비과장, 전기6 김상신, 임광수

- (강  북) 소장, 정수시설과장, 전기6 손영일, 전기안전관리자 등

- (시공사) 전기공사, 특고압배전반, 고압배전반 제작업체 등

- (감리사) 책임감리원, 보조감리원, 기술지원감리원

□ 착공보고회 개최결과 주요의견

ㅇ 본부 생산부장

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 강북정수센터 소장

*************************************************************************************************************************************

ㅇ 참석자 의견

*******************************************************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************

*******************************************************************************************

*********************************************************************************************************************************

□ 향후계획

ㅇ '23. 8. : 관급자재(수배전반 등) 제작승인도서 전문가 기술검토

붙 임 : 1. 착공보고 자료 1부.

2. 회의사진 1부.  끝.