문서번호	공원시설과-1506
결재일자	2023. 8. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
유재우		양돈욱	08/21
			허현수
협 조

『잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성사업』

통신공사 설계변경 검토 보고

2023. 8.

공   원   부

(공원시설과)

『잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성사업 』

통신공사 설계변경 검토 보고

우리 본부에서 시행중인 『잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성사업』통신공사에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함

공사개요

○ 공 사 명 : 잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성사업 통신공사

○ 공사기간 : 2022. 3. 2. ~ 2023. 11. 30.

○ 도 급 비 : ***********

○ 계 약 자 : **************

설계변경 내용

○ 통신방식 변경(무선→유선)

- 이더넷, 무선랜 액세스포인트 등 무선 관련 물량삭제로 관급자재 금액 감소

- 광섬유케이블, 광 접속함 등 유선물량 추가

- 터파기, 되메우기 등 토목작업 수반

○ 계약금액 변경

(단위 : 원)

구 분		공 사 비		증 감
		당 초	변 경
총 공 사 비		164,118,000	202,470,000	증)	38,352,000
도급액	공급가액	28,362,728	100,298,182	증)	71,935,454
	부가세	2,836,272	10,029,818	증)	7,193,545
	계	31,199,000	110,328,000	증)	79,129,000
관 급 비		132,919,000	92,142,000	감)	40,777,000

○ 관련근거

- 『계약예규 공사계약일반조건』제 19조 제1항 4호 및 제 20조

-   발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정한 경우 계약금액 조정 가능

-   무선으로 시공 시 전파간섭이 빈번할 것으로 우려되며, 특히 대금결제 등 금융거래 신뢰성에 밀접한 관련이 있는바 유선으로 설계변경이 불가피하다고 사료됨

○ 예산과목

- 미래한강공원 공원시설과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,

잠실 자연형 물놀이장 조성, 시설비 및 부대비, 시설비

조치의견

○ 본 사업 추진 중 안정적인 수영장 통신운영을 위해 변경된 사항에 대햐여 설계변경을 시행하고자 함

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 실정보고서 1부.

3. 검증확인서(통신) 1부.  끝.