문서번호	교량안전과-3139
결재일자	2023. 8. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	특수교량팀장	교량안전과장
나용수	김귀용	08/23
		조현석

2023년 한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리용역 추가 과업 시행 계획 검토

'23년 한강교량 온라인 안전감시시스템

추가 과업 시행 계획 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  08.

교량안전과

(특수교량팀)

‘23년 한강교량 온라인 안전감시시스템

추가 과업 시행 계획 검토

2023년 한강교량 온라인 안전감시시스템을 확장하기 위한 안전감시 시스템 프로그램의 확장이 필요하여 유지관리 업체에 추가 작업 요청 계획을 보고드림

□ 관련 근거

ㅇ 한강교량 온라인 안전감시시스템 확대설치 운영 방안 검토보고
(교량안전과-7742, 2023.5.1.)

ㅇ 한강교량 온라인 안전감시시스템 확대 구축용역 시행계획
(교량안전과-2340, 2023.8.8.)

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 2022년 한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리용역(2차)

ㅇ 용역대상 : 한강교량 11개소
(올림픽, 청담, 원효, 서강, 한강, 성수, 성산, 가양, 행주, 양화, 암사대교)

ㅇ 기    간 : ’22.01.01.~’24.12.31.(장기계속, 2차 : ’23.01.01.~12.31.)

ㅇ 용 역 사 : ㈜유신 + ㈜일신이앤씨

ㅇ 용 역 비 : 1,094,632천원
(’22 : 364,870천원, ’23 : 364,881천원, ’24 : 364,881천원)

□ 추진현황

ㅇ ’23.05.01. : 『한강교량 온라인 안전감시시스템』 확대설치 방침 수립

ㅇ ’23.06.05. : 제7차 재난관리기금 운용심의회 심의 결과 통보

ㅇ ’23.07.13. : 기술용역 타당성 심사 결과 통보

ㅇ ’23.07.31. : 나라장터 사전규격 공개

ㅇ ’23.08.08. : 공고요청

□ 추가 과업 내용

ㅇ 시스템(프로그램) 업그레이드(102,581천원)

- 온라인 안전감시시스템 유지관리 프로그램에 3개 교량 추가 개발

- Iot 신규 서버 설치(통합서버용)

ㅇ 3개 교량 유지관리(115,000천원)

- 계측시스템 구축 후 정기점검 및 결과분석(4회/년) 등

ㅇ 용역비 확보 방안(217,581천원)

- 재난관리기금(720,000천원) 활용

□ 향후 계획

ㅇ 한강교량 온라인 안전감시시스템의 원활한 사업추진을 위하여 추가된 내용을 용역사에 통보하고 추후 설계변경 추진

붙임 : 1. 설계변경 개요서 1부.
2. 증가된 물량 단가조사서 1부.  끝.