문서번호	도로보수과-8803
결재일자	2023. 8. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
강병국		김순수	08/24
			이도헌
협조

『2023년 노후 포장도로 정비공사(1구역)』 실정보고(제1회)에 따른 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 8.

북부도로사업소

(도로보수과)

『2023년 노후 포장도로 정비공사(1구역)』 실정보고(제1회)에 따른 검토보고

도로보수과장 :김순수☎944-5402    담당 : 강병국☎944-5430

2023년 도로포장 정비계획 지침 변경(서울시 도로관리과)에 따른 노후포장도로 정비공사(1구역)의 시공 노선 및 정비물량에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관련 근거

□ 노후포장도로 정비공사 추진계획 변경 보고 구간(도로보수과-4757호(2023. 5. 10.))

ㅇ *********************

ㅇ ******************************

□ 노후포장도로 정비 구간 보완 요청(도로관리과-10062호(2023. 6. 16.))

ㅇ ****************************************

□ 책임검설사업관리기술인 실정보고(제1회)(도로굴착복구 제2023-269호(2023. 8. 9.))

ㅇ ***************************************

Ⅱ		공사 개요

ㅇ 공 사 명: 2023년 노후포장도로 정비공사(1구역)

ㅇ 공사기간: ********************

ㅇ 공사규모: **********************************

ㅇ 공 사 비: *******************

ㅇ 시 공 사: *******

ㅇ 건설사업관리단: *******************

Ⅲ		보고 내용

□ 삼양로 보수구간 결정 및 공사 시행

ㅇ 도로관리과의 정비 구간 보완요청에 따라 ********************************************************************************************************한 실정임.

- 삼양로 보수공사 개요

·*******************************

·***************************************

- 공사비 변경내역

(단위: 원)

구 분	공사금액			비 고
	당 초	변 경	증 감
총공사비	*************	*************	*************
도급비	*************	*************	***********
관급비	*************	*************	***********
이전비	***********	***********	**********

ㅇ 도로 포장의 연속성을 위해 추가 정비에 소요되는 ***************************************************************

Ⅳ		책임건설사업관리 기술인 검토의견

ㅇ 서울시 도로포장 정비계획 지침 변경에 따른 노선 조정 및 변경 수량 적용에 대한 검토 결과 타당하다고 판단됨.

Ⅴ		향후 계획

ㅇ 서울시 도로관리과에 요청한 예산 부족분의 재배정 여부는 불투명한 상태이며, 9월 중순부터 삼양로의 포장정비공사가 시작됨을 감안하여 ***********************************************************************************************진

ㅇ 책임건설사업관리 기술단 및 시공사에 상기 내용에 대하여 통보하여 설계변경 및 공사 시행

붙임  1. 책임건설사업관리인 실정보고(제1회) 1부.

2. 실정보고 내역서(제1회) 1부.

3. 위치도(삼양로) 1부.  끝.