문서번호	기반시설과-1495
결재일자	2023. 8. 24.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
정영환		이석근	08/24
			이유국
협 조

한강공원 이동형 화장실 부상형 전환

기반시설공사 설계변경 검토(안)

2023. 8.

시설부 기반시설과

미래한강본부

(기반시설과)

한강공원 이동형 화장실 부상형 전환

기반시설공사 설계변경 검토(안)

『한강공원 이동형 화장실 부상형 전환 기반시설 공사』의 원할한 추진을 위하여 설계변경(공기연장)을 검토하고 보고드림.

□ 공사개요

○ 건    명 : 한강공원 이동형 화장실 부상형 전환 기반시설공사

○ 공사규모 : 화장실 9동 이동, 상수도 및 오수관 재설치 등

○ 공사기간 : '22. 12. 09. ~ '23. 8. 31.

○ 도 급 비 : **************

○ 도 급 사 : *********

□ 설계변경 검토

○ 변경 사항 : 준공기한 연장

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
****	'************'*******	'************'*******	******

※ 물량 및 금액 변동 없음

○ 변경***

*************************************************************************

************************************************************

※ 기상청 최근 6개월 강수 일수 : 60일(누적 강수량 1,100mm)

○ 진행 중인 공사 위치 : 여의도공원 파크골프장 화장실

파크골프장 앞

화장실

□ 향후 추진

◯  '23. 08. 28.  설계 변경 계약 의뢰(본부 총무과)

◯  '23. 09. 15.  공사 준공

붙임  합의각서.  1부.  끝.