문서번호	급수운영과-13813
결재일자	2023. 8. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
이현우		김윤환	08/24
			이용구
협조

설계변경 심의 결과보고

(신원로3길 장기사용 배수관 정비공사)

2023.  08. 24.(목)

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 사전심의 결과 보고

「신원로3길 장기사용 배수관 정비공사」신규공종 및 계약⦁물량 증감에 따른 설계변경 사전심의를 마치고 그 결과를 보고 드림

1		설계변경 검토보고

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 신원로3길 장기사용 배수관 정비공사

ㅇ 공사개요 : D=80 ~ 400mm, L=464m

ㅇ 공사기간 : 2023. 04. 24. ~ 2023. 08. 30.

ㅇ 도 급 자 : *************

ㅇ 도 급 액 : *************

□ 설계변경 시행 금액

***********************************************************************************************

□ 설계변경 근거 및 사유

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법 시행령 제74조 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 행정안전부예규 제252호(2023. 7. 1.)

- 제9장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정

ㅇ 공사 시행중 현장여건 변동에 따른 신규공종 발생 및 물량변동(증 ․ 감)

2		설계변경 심의

□ 관련문서

ㅇ 설계변경 심의위원회 개최(신원로3길 장기사용 배수관 정비공사)

□ 설계변경 심의 결과

ㅇ 설계변경 타당성 : 타당

ㅇ 신규공종 및 계약물량 변동 적정 여부 : 적정

ㅇ 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 여부 : 적정

ㅇ 각종 제반규정 준수여부 : 준수

□ 설계변경 현황

ㅇ 계약금액 변경

**************************************************************************************************************************************************************************************

3		설계변경 세부내용

□ 설계변경 공사개요

공 종	규 격	단 위	당 초	변 경	증·감	비 고
배급수관 부설	D=80~400mm	m	464	456	감) 8
인입관 부설	D=20~50mm	m	26	41	증) 15
밸브실 설치	D=80~400mm	개	41	37	감) 4

ㅇ 주요공종 물량 증가내역

- 아스팔트 포장깨기 굴삭기(타이어) 0.18㎥(브), 지세 외 152개 공종

ㅇ 주요공종 물량 감소내역

- 인력터파기 견질토사 0-1m, 지세 외 159개 공종

ㅇ 신규자재 발생내역

- 새들, 주철관용(슬립) 400/25 외 4개 자재

ㅇ 신규공종 발생내역

- 가설급수장치 본관 설치 및 철거 외 76개 공종

□ 계약금액조정 검증결과 : 적정

ㅇ 계약금액검증조정 시스템에 입력하여 확인결과 최초계약에 따른 요율을 상한초과한 항목이 없으며 특이사항없음.

4		조치계획

□ 설계변경 시행 및 계약의뢰

ㅇ 보험료, 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비, 건설기계대여대금 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 관련 규정에 맞게 처리하고자 함.

ㅇ 설계변경 심의위원회 개최결과가 적정함에 따라 행정지원과에 변경계약을 의뢰하여 설계변경을 시행하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.

3. 설계변경 사전심의 의결서 1부.  끝.