아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	총무과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기요청(2023년 광나루한강공원 장미터널 조성공사(2단계))

「2023년 광나루한강공원 장미터널 조성공사(2단계)」의 관급자재 납품기한을 연기하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 건    명: 관급자재 구매(2023년 광나루한강공원 장미터널 조성공사(2단계))

2. 구매품명: 흙막이 등 3종

3. 요청내역

물품 식별번호	납품 요구번호	품명	규격	단위	수량	단가(원)	납품기한
							변경 전	변경 후
24234876	12-23-1-66389-00	금속제울타리 (휀스)	W2000×H750mm	m	711	144,000	2023.08.31.	2023.09.30.
23579675	12-23-1-66387-00	금속제울타리 (흙막이)	W1500×H800mm	m	509	356,400
20280452	12-23-1-64204-00	토양개량제	20kg/포	포	148	13,260

4. 연기사유: 도급공사 준공기한 연기에 따라 관급자재 납품기한 연기하여 공사의 내실을 기하고자 함(당초 준공기한 2023.08.29.→ 변경 준공기한 2023.10.06.).  끝.

	녹 지 관 리 과 장
주무관	이한솔		녹지관리과장	08/24
이무림
협조자	주무관	백지원
시행	녹지관리과-1505	(	2023. 8. 24.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 녹지관리과 (성수동1가)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0845	/전송	02-3780-0745	/	onlhs1001@seoul.go.kr	/	부분공개(5)