문서번호	치수과-13515
결재일자	2023. 8. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		치수팀장		치수과장		안전건설교통국장
이은찬		오상호		민병기		전결 08/24
						신용철
협조

공사 현안사항 검토보고[2023년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약)]

[2023년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약)]

공사 현안사항 검토보고

2023. 8.

(안전건설교통국 치수과)

공사 현안사항 검토보고

장마종료 및 2차 우기대비를 위한 긴급준설 시행으로 수방시설(유수지, 집수정, 유입암거 등)의 방재능력 극대화로 수방대책에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 2023년 제4차 특별조정교부금 교부결정 알림 및 간주처리 요청

(기획예산과-10209, `23. 7.27) / *****************************

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2023년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약)

○ 기    간 : 2023. 2.28. ~ 12.31.

○ 내    용 : *******************************

○ 도 급 비 : ***********

○ 시 공 사 : 현준종합건설(주) 대표 임혜진

□ 추진경과

○ 2023. 2.28.     공사계약 및 착공

○ 2023. 3. 6.     작업지시(1차)

- 우기 전 수해 예방을 위한 하수관로 준설

○ 2023. 4. 3.     설계변경(1회)

- 여름철 집중호우 대비 빗물펌프장 및 하천준설

○ 2023. 4~6.     작업지시(2~4차)

- 집중호우 대비 방재능력 극대화를 위한 빗물펌프장, 하천 준설

○ 2023. 6. 9.     설계변경(2회) … 공정율 60%

- 마장축산물시장 일대 집중 준설(물청소) 및 유수지 악취저감 사업

○ 2023. 6~7.     작업지시(5~6차)

- 마장축산물시장 일대 하수관로 세정 및 주요 간선도로 준설

□ 보고내용

○ 재배정 예산(특교금)활용방안 … ***********

- 빗물펌프장 유수지 및 유입암거 퇴적물 준설 … *********

- 배수불량 민원처리 등 긴급준설 … *********

○ 수방시설 방재능력 확보 긴급준설 실시 … 장마종료 및 2차 우기대비

- 뚝섬빗물펌프장외 2개소 유수지 및 유입암거 등 퇴적 준설토 신속정비  (L=1,426m, V=1,392.05㎥, **************)

□ 조치계획

○ 작업지시(7차) 시행 …**********

- 예산절감 및 신속집행 이점을 고려,「2023년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약)」시공사에 작업지시한 후, 추후 설계변경코자 함.

- 계약잔액*********** + 특교금***********

○ 배수불량 민원처리 등 긴급준설 시행 … *********

○ 공사비 변동내역

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	*********	*********	*********
도 급 비	*********	*********	*********
이 전 비	*******	*******	*

□ 향후계획

○ 2023. 8.           작업지시(7차) 시행

○ 2023. 9.15.(예정)  설계변경(제3회) 및 기성금 지급

○ 2023.12.           공사준공.

붙임  1. 물량조사서 1부.

2. 현장조사사진 1부.  끝.