문서번호	녹색에너지과-18817
결재일자	2023. 8. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	에너지산업팀장	녹색에너지과장
김동일	김선례	08/24
		김재웅

자체 기술용역 타당성 심사 계획

-공공기관 건물일체형태양광-

자체 기술용역 타당성 심사 계획

2023. 8.

기후환경본부

(녹색에너지과)

- 공공기관 건물일체형태양광 -

자체 기술용역 타당성 심사 계획

****************** BIPV 설치공사 설치 전, 건축분야  실시설계 용역에 대한 자체 기술용역 타당성 심사를 수행하고자 함

□ 추진 근거

ㅇ ********************************************

ㅇ 타당성심사 및 건설공사 지도·점검 업무개선(행정2부시장방침 제20호, ’20.1.)

- ************************************

□ 사업 개요

ㅇ 사 업 명 : 공공기관 건물일체형태양광 실시설계용역(건축분야)

*********************

******************************

ㅇ 용 역 비 : ********

ㅇ 용역내용

- 가설공사, 철거공사, 금속공사(하지공사), 건설폐기물처리, 기타공사 등

□ 심사 개요

ㅇ 심 사 일 : ’23.8.25.(금)

ㅇ 심 사 자 : 에너지산업팀장 및 녹색에너지과 직원 2명

ㅇ 심사대상 : 공공기관 건물일체형태양광 실시설계용역(건축분야)

ㅇ 심사내용 : 용역 시행의 타당성, 과업 범위 및 용역비 산출 적정성 등

□ 향후 일정

ㅇ ’23.8. : 수의계약 체결 의뢰(→ 재무과)

ㅇ ’23.8. ~ 9. : 건축분야 실시설계 용역 수행

ㅇ ’23.9. : 관급자재 발주 및 계약체결, 전기공사 발주

ㅇ ’23.10. : 건축공사, 감리용역(전기․건축) 발주 및 계약 체결

ㅇ ’23.12. : 사용전검사(한국전기안전공사) 및 준공

붙임  심사 서류 각 1부.  끝.