문서번호	시설관리과-19952
결재일자	2023. 8. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이동규		유세종	08/25
			이동욱
협조

『2023년 동선동 외 5개동 장기사용 배급수관 정비공사』

현장실정 검토보고(3차)

2023. 08. 25. (금)

중부수도사업소

(시설관리과)

현장실정 검토보고(3차)

우리사업소에서 시행중인「2023년 동선동 외 5개동 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련하여 실정보고 사항에 대해 검토 후 그 결과를 보고드림

관련문서 : 서울시설공단 공사감독2처-9784(2023.08.23.)

Ⅰ		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 동선동 외 5개동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사개요 : *******************

ㅇ 공사위치 : *************

ㅇ 공사기간 : 2023. 04. 20. ~ 2023. 11. 20.

ㅇ 계약금액 : ************

ㅇ 계 약 자 : **************

ㅇ 발 주 처 : *****************

ㅇ 감 독 처 : *****************

Ⅱ		보고내용

□ 횡단굴착 개소 증가 및 확폭(5-2구간)

ㅇ 현황 및 문제점

횡단굴착 현황	사진대지

- 기존관 확인 및 관로 선형 계획을 위해 횡단굴착 개소 증가 및 확폭이 필요한 실정임

※ ************************************

ㅇ 현황 및 사진대지

ㅇ 검토의견

- 기존관 확인 및 관로 선형 계획을 위한 횡단굴착 개소 증가, 확폭 시행 및 굴착인력비율 조정은 적정하다고 판단됨

- 개략 공사비 : ********

□ 도종 및 두께 변경(5-2구간)

ㅇ 현황 및 문제점

- 당초 설계는 도종이 A-2로 설계되어 있으나, 굴착결과 CA-2로 확인되어 도종, 두께 및 폐기물 물량 변경이 필요한 실정임

※ ************************

ㅇ 사진대지

도종 및 두께 변경

ㅇ 검토의견

- 도종 및 두께 변경에 의한 토공, 폐기물 물량 변경사항은 적정하다고 판단됨

- 개략 공사비 : **********

□ 일부구간 확폭 및 인력굴착 비율 증가(5-2구간)

ㅇ 현황 및 문제점

- 당초 설계는 연결부 인력비율이 10%로 설계되어 있으나, 지장물(통신, 하수 등) 다수 존재하여 인력굴착이 반복적으로 병행됨에 따라 일부구간에 대하여 인력굴착 비율을 30%로 조정 반영이 필요함

- 굴착결과 하수관, 통신 등 다수의 지장물로 인한 일부 직관부에 대하여 확폭이 필요한 실정임

확폭시행

ㅇ 사진대지

ㅇ 검토의견

- 일부 구간에서의 인력 터파기(10% → 30%) 증가 및 확폭은 현장여건에 맞게 조정 반영함이 적정하다고 판단됨

- 개략 공사비 : **********

□ 횡단굴착 확폭(3구간)

횡단굴착 현황	사진대지

ㅇ 현황 및 문제점

- 기존관 확인 및 관로 선형 계획을 위해 횡단굴착 확폭이 필요한 실정임

※ *******************

ㅇ 현황 및 사진대지

ㅇ 검토의견

- 기존관 확인 및 관로 선형 계획을 위한 횡단굴착 확폭 시행 및 굴착인력비율 조정은 적정하다고 판단됨

- 개략 공사비 : ********

□ 일부구간 확폭 및 심도 증가(3구간)

ㅇ 현황 및 문제점

- 기존관 연결 및 정자분기를 위한 확인굴착 결과 가스, 하수, 통신 등 다수의 지장물로 인한 일부 구간에 대하여 확폭이 필요하며,

- 기존관 심도에 따라 굴착심도 증가가 필요한 실정임

확폭 및 굴착심도 증가

ㅇ 사진대지

ㅇ 검토의견

- 일부 구간에서의 확폭굴착 및 굴착심도 증가는 현장여건에 맞게 조정 반영함이 적정하다고 판단됨

- 개략 공사비 : ********

Ⅲ		조치계획

**	**	**	***
***	*********	*********	***********

ㅇ 실정보고 검토 결과 현장실정에 따라 변경하는 것이 적합하다고 판단되며,

ㅇ 서울시설공단으로 승인통보하여, 향후 설계변경 시 증·감분에 대하여 반영토록 함.

붙임  공단 현장실정 검토보고서 1부.  끝.