문서번호	급수운영과-13856
결재일자	2023. 8. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
서동민	김윤환	이용구	08/25
			김분숙
협 조
	시설관리과장		代오영진
	주무관		김준영
	주무관		김효준

「관악산공원 급수환경 개선공사 준공에 따른」

급수설비 및 시설물 인수인계 계획

2023.  08. 24. (목)

남부수도사업소

(급수운영과)

급수설비 및 시설물 인수인계 계획

과장 :이용구☎3146-4540 팀장 :김윤환☎4554 담당 :서동민☎4564

전통사찰(성주암) 급수공급 및 관악산공원 급수환경 개선을 위한 공사가 완료됨에 따라 급수설비 및 시설물의 인수인계 계획을 아래와 같이 보고드림.

□ 공사개요

ㅇ 위    치 : 관악구 신림동 산50-2임 ~ 성주암 진입로

ㅇ 사 업 비 : ****************************

ㅇ 공사내용

- 주계량기 및 관로부설 : D=25~50mm, L=388m

- 증압장 구조물 및 증압펌프, 현장자동제어반 설치

- 감압밸브 구조물 설치 및 노후중간밸브 교체

□ 급수환경 개선 효과

ㅇ 지하수 오염 및 고갈에 따른 전통사찰 이용객 급수불편 해소

<기존>

						성주암 미급수
주 계량기			1광장 화장실 2kgf/㎠
						2광장 화장실 측정불가

<개선>

							성주암 2kgf/㎠
주 계량기		증압장	토출수압	1광장 화장실 3kgf/㎠
			9kgf/㎠
							2광장 화장실 2kgf/㎠

ㅇ 관악산공원 내 공용화장실 및 관악산 119구조대, 관악산치유센터 등 수압개선으로 시민 편익 증대

******

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 시설물 인수인계 계획

ㅇ 근    거 : 「성주암 및 관악산공원 급수시설 개선 설치 및 이관운영에 관한 협약, 2022.11.」

ㅇ 시 설 물 : 주계량기 이후 급수시설 일체(토목/기계/전기)

ㅇ 인 계 자 : 사업소 시설관리과장, 급수운영과장, 각 시설물 담당자

ㅇ 인 수 자 : 관악구청 공원녹지과장, 관악산공원 관리팀장, 시설 담당자, 공원 담당자

ㅇ 일    시 : 2023. 08. 31.(목) 14:00 ※ 상세일정은 구청과 조율하여 시행

ㅇ 인수인계 내용

- 인수인계 목록

- 준공도면 및 유지관리지침서

ㅇ 인수인계 방법

- 공사 시행기관인 남부수도사업소, 시설물 운영 주체인 관악구청의 각 분야별 관계자 합동 입회하에 인수인계 목록에 대한 현장확인 및  인수인계서 날인

□ 행정사항

ㅇ 2023. 08. 25.(금) : 시설물 인수인계 실시계획 통보(사업소 → 관악구청)

ㅇ 2023. 08. 31.(목) :  시설물 인수인계 실시

ㅇ 2023. 09. 01.(금) ~  : 보완사항 시행 및 동절기 동파 점검

붙임 1. 시설물 인수인계서 1부.

2. 시설물 인수인계 목록 1부.

3. 시설물 인수인계 상세목록 1부.

4. 가압모터펌프 유지관리 지침서 1부.

5. 감압밸브 유지관리 지침서 1부.

6. 급수시설 개선 설치 및 이관운영에 관한 협약서 1부.