문서번호	정보시스템담당관-14596
결재일자	2023. 8. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시스템혁신팀장	정보시스템담당관
최수현	이우종	08/28
		우정숙
협 조

『메신저시스템』

가상화서버(VM) 이관 계획(안)

2023.  8.

정보시스템담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『메신저시스템』

가상화서버(VM) 이관 계획(안)

장기 사용으로 노후화된 서버교체 및 내용연수 경과에 따른 OS업그레이드 등 안정적 운영을 위한 가상화서버(VM) 이관 추진계획 보고임.

Ⅰ		추진배경

□ 관련근거

ㅇ 프론트 오피스 가상서버 배정 알림 (인터텟통신과-5223호, '23.6.2.)

ㅇ 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 제12조

(국가기관등의 클라우드컴퓨팅 도입 촉진)

ㅇ 행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시(클라우드컴퓨팅서비스 우선 검토)

□ 현안사항

ㅇ 기술지원 종료 운영체제 사용에 따른 보안 위협 증대로 변경운영 필요

ㅇ 서버 노후화(’16년 구축, '18년 구축)로 인한 NAS 처리 속도 저하, 장비 다운 등으로 교체 시급

ㅇ 급변하는 IT 환경 및 사용자 요구에 신속하고, 탄력적으로 대응할 수 있는 안정적인 가상화서버 환경으로 이관 필요

□ 추진경과

ㅇ 서버 이관 협의 (데이터센터)                      : ’22. 6. ~ 12.

ㅇ 서버환경 설정 및 라이선스 요구사항 협의        : ’23. 1. ~ 5.

ㅇ 이관을 위한 데이터센터 가상화 서버 배정           : ’23. 2. ~ 5.

ㅇ ’23년 배정 서버 가상화서버 운영환경 구성 추진  : ’23. 3. ~ 8.

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : 메신저시스템 가상화서버(VM) 이관

□ 소요예산 : 메일시스템 유지관리 범위에 포함(계약금액 : 491,868천원)

□ 사업내용

ㅇ 메신저 시스템을 가상화서버로 안정적 단계적 이관 추진

ㅇ 최신 버전 OS로 가상화서버 운영환경 개선 후 시스템 안정적 이관

□ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12월

ㅇ 대상시스템 : 메신저 시스템

**	****	****	*** ******	*** *****	도입일
*******	***************************** **********		***************************		*********
	**************** **********		******************************		*********

Ⅲ		추진계획

□ 추진방향

ㅇ 가상화서버 운영환경에 맞추어 철저한 테스트 및 검증을 거쳐 시스템 안정성, 확장성을 확보하여 가상화 기반 서비스로 전환

□ 이관 절차

이관 계획수립	→	이관 업무협의	→	이관 상세설계 및 환경구성	→	이관 시스템 소스이관· 테스트 및 일정 확정	→	이관 시행	→	안정화
정보시스템담당관		정보시스템담당관, 데이터센터		정보시스템담당관, 데이터센터		정보시스템담당관, 데이터센터		정보시스템담당관, 데이터센터		정보시스템담당관

ㅇ 이관계획을 통해 데이터센터와 협의

- 데이터센터와 클라우드 이전을 위한 서버 및 네트워크 환경 등 협의

ㅇ 가상화서버 이관을 위한 하드웨어와 소프트웨어 구성 등 상세설계 및 환경구성

- 가상화서버의 효율적 운영 및 데이터센터 가상화서버 환경을 고려한 최적의 인프라 구성안 설계

- 데이터센터 서버 환경에 맞추어 적절한 이관 계획을 수립하여 시행착오를 줄이고, 비용, 효율성 등 효과 극대화

- 배정받은 클라우드 서버(가상화)에 각종 SW 설치 등 운영환경 구성

ㅇ 시스템 소스이관·테스트 및 일정 확정

- 가상화서버에 실 운영환경을 구축하여 이관 전 테스트 및 결함·오류 수정

- 운영체제 업그레이드******************************************에 따른 프로그램 수정

- 기본설정*****************************등 상용 소프트웨어 업그레이드에 따라 새로운 가상화 서버 환경 관련 라이브러리 변경 및 프로그램 수정

- 데이터센터와 이관 일정 협의·확정

- 이관 관련 상세 작업순서 및 테스트 방법 등 협의·결정

ㅇ 이관 시행

- 메신저 시스템 운영중단

- 최종 데이터 및 프로그램 소스 클라우드 서버(가상화)로 이관

- 이관 데이터 검증 및 시스템 테스트

- 이관 서버에서 시스템 기동 및 서비스 운영개시

□ 시스템 이관 일정(시스템 중단 : '23. 8.28(월) 18:00~23:00)

******	****		****
********	******************** ******************
********	*************		*************
********	***********************		***********
*****	***************************		***********
*****	***************	************** ***************************** *************************************** ***************************	*************
*****		******************* *********	************
********* *****		*******************	*************
********* *****		*****	*************
********	******		**************
	*******		**************

□ 시스템 이관 실패 시 원복 계획

ㅇ 판단시간 : 오픈일 18:00 ~ 19:00

ㅇ 판단기준

- 메신저서비스 정상 운영상태

- 메신저서비스 정상 동작 여부

- 메신저 데이터 이관, 서버 접속, NAS 정상 속도, IP 및 도메인 접근 등 연계 기능 정상동작 여부

ㅇ 원복계획

시간대별	시스템	작업내용	작업자
23:00 ~ 23:30	공통	- 서버 환경설정 원복 - 서버반영 후 재기동	개발자, 최수현
23:30 ~ 24:00	공통	- 기존 운영 시스템 정상 서비스 확인 (로그인, 관리기능 등) - 각 분류별 화면 정보 조회	개발자, 최수현
24:00 ~	공통	- 전환 실패 사유 점검 원인 해결 후 서버 전환 일정 재협의	개발자, 최수현

끝.