문서번호	기전과-9764
결재일자	2023. 8. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
노경환		08/30
		최경주
협조

설계변경 검토 보고

(2023년 교통안전표지 유지보수공사-연간단가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 08. 30.(수)

서부도로사업소

(기전과)

-2023년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)-

설계변경 검토 보고

2023년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 관련 규제사항, 민원 처리, 신규내역 증가로 공사금액이 부족하여 집행잔액을 사용 설계변경 후 사업 추진코자 함

Ⅰ. 관련 근거

□ 2023년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)설계변경 건(감리)

- ㈜글로벌메타(2023. 08. 30.)

□ 집행잔액(낙찰차액) 사용계획 보고

- 기전과-9663(2023. 08. 29.)

Ⅱ. 공사 개요

□ 공사명: 2023년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

□ 시공사: ***********

□ 감리원: **********

□ 계약 기간: 2023. 2. 14.∼ 2023. 12. 31.

□ 계약 금액: ***********

Ⅲ. 설계변경 내용

□ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
도급비	**********	***********	************

□ 설계변경 내역

○ 변경내역

구 분	설계 변경(정산) 내용	증·감
재료비(물량변경)	************************* ********************************	*************

노무비		***************************	*************
제경비	기계경비	**************************	*************
	산재․고용보험료	*************************** ***************************	*********** **********
	환경보전비	******	****
	건강․연금보험료 등	******	****
	기타경비	*************************	*************
	산업안전보건관리비	******	****
기 타(고재처리․제경비 정산에 따른 일반관리비, 이윤 등)		**************************	*************
합 계		****************************	**************

○ 신규내역

- 태양광발광형표지판 신설 1개 → 마른내로163주변

□ 설계변경 사유

○ 신규내역, 규제사항, 민원처리 등 공사물량 증가로 공사금액이

부족하여 집행잔액을 사용하여 공사비 확보

Ⅳ. 행정사항

□ 2023. 08. : 설계변경 계약 요청 → 관리단속과

□ 2023. 12. : 공사 준공

첨부 1. 설계(변경)내역서 1부.

2. 제비율검증확인서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 감리검토 보고서 1부.  끝.