문서번호	시설보수과-5083
결재일자	2023. 8. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
김수천		김시련	08/30
			심형보
협 조

혁신제품 시범사용 납품기한  연기요청 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.8.

성동도로사업소

(시설보수과)

혁신제품 시범사용 납품기한 연기요청 검토보고

우리사업소에서 사용예정인 혁신제품 시범사용과 관련하여 납품사로 부터 천재지변(집중호우)으로 인한 납품 연기원이 접수되어 검토  보고드림

1		공사개요

□ 사 업 명 : 2023년 혁신제품 시범구매(복합형 탄성 프리캐스트 신축이음채움재)

□ 계 약 일 : 2023.8.10(계약일로부터 30일)

□ 도 급 액 : 131,000천원

□ 납품업체 : (주)오에이티엠엔씨  대표 권봉주

2		보고내용 및 검토결과

□ 납품기한 연기 요청

○ 납품기한   (당초) 계약일(8월10일)로 부터 30일.

(변경) 계약일(8월10일)로 부터 90일.

○ 연기사유 : 우기철 집중호우로 인해 제품생산 공장의 제작설비 유실 및 파손으로 납품일정 지연

□ 검토결과

○ 우기철 집중호우로 인해 제품생산 공장의 제작설비가 유실 및 파손되어 납품일정이 지연된 사항으로 연기 조치함이 타당할 것으로 판단됨.

○ 지제상금 부과여부 : 미부과

3		조치계획

□ 상기 검토 사항과 같이 납품기한 연기원을 승인하여 제작설치에       만전을 기하고자 함.

○ 납품기한 변경 승인

(당초) 계약일(8월10일)로 부터 30일.

(변경) 계약일(8월10일)로 부터 90일.

붙임 : 혁신제품 시범사용 납품일 변경요청 관련서류 1부.  끝