문서번호	정수시설과-6959
결재일자	2023. 8. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
정상수		08/30
		정인영
협 조
	주무관		장현순

『뚝도 정수지(2호지) 내부 방식공사』 누수구간 균열 보수 등에 대한 실정보고

2023.  8.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

『뚝도 정수지(2호지) 내부 방식공사』

누수구간 균열 보수 등에 대한 실정보고

“뚝도 정수지(2호지) 내부방식공사”와 관련하여 책임건설사업관리인으로부터 누수구간 균열 보수 등에 대한 실정 보고가 있어 검토 보고 드림.

□ 공사 현황

○ 공 사 명 : 뚝도 정수지(2호지) 내부 방식공사

○ 공사개요 : *********************************

******************************

○ 공사기간 : 2022.10.4. ~ 2023.09.28.

○ 계약금액 : **************

□ 실정 보고 내용

○ 관련근거

- *****************************************************

○ 보고내용

① 천장 및 벽체 누수구간 균열보수

▸ 현 설계 내 천장 및 벽체 누수구간의 균열보수가 미반영되어 도막 방수방식 시공시 하자발생 우려

▸ 우천후 현장조사 결과 누수구간의 균열보수 반영 필요

균열(천장)
균열(벽체)

▸ 수량 및 공사비 증감 현황

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
*********		*	*	**	**	신규단가

공 종	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
직접공사비	-	*********	*********
제잡비	-	*******	*******
순공사원가	-	*********	*********
기타	-	*******	*******
공급가액	-	*********	*********
부가가치세	-	*******	*******
도급액	-	*********	*********

② 유입·유출관 도장 적용

▸ 현 설계 확인결과 정수지내 유입·유출관 배관도장 미반영

▸ 현장조사 결과 유입·유출관 노출부 부식방지를 위하여 배관도장 필요

유출관 부식	유출관 부식

▸ 수량 및 공사비 증감 현황

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
유입,유출관 도장		㎡	-	****	****	신규단가

공 종	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
직접공사비	-	*********	*********
제잡비	-	*********	*********
순공사원가	-	*********	*********
기타	-	*******	*******
공급가액	-	*********	*********
부가가치세	-	*******	*******
도급액	-	*********	*********

③ 자재인양구 복구공사 동바리 반영

▸ 현 설계 확인결과 자재인양구 복구공사 공종 중 동바리 미반영

▸ 자재인양구 복구공사 높이가 5.4m로서 동바리 설치후 복구공사 가능

▸ 수량 및 공사비 증감 현황

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
자재인양구 복구공사		개소	*	*	*	동바리설치반영
이형철근	HD25	TON	*****	*****	*
철근가공조립	간단	TON	*****	*****	*
철근콘크리트 타설	인력비빔소형구조물	㎥	***	***	*
합판거푸집 설치	1회	㎡	*	*	*
케미컬앙카시공		공	**	**	*
동바리설치	시스템동바리	공㎥	*	****	****

공 종	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
직접공사비	*********	*********	*********
제잡비	*********	*********	*******
순공사원가	*********	*********	*********
기타	*******	*********	*******
공급가액	*********	*********	*********
부가가치세	*******	*******	*******
도급액	*********	*********	*********

□ 조치의견

○ 시민에게 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위해 시행하는 정수지 내부방식공사 목적에 맞게 실정보고 사항을 반영하여 공사함이 타당함.

○ 책임건설사업관리기술인이 제출한 실정보고 건이 타당하므로 실정보고 건을 승인통보하고, 이에 따른 시공물량 등 증가분은 건설공사 품셈 사용 및 낙찰율을 적용하고, 우선 공사를 시행한 후 증액되는 공사비는 설계변경 시 반영하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 실정보고서(내역서 등 관련 문서 포함) 3부.  끝.