문서번호	도시철도토목부-10572
결재일자	2023. 8. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
김봉성		박형복	08/31
			윤병헌
협 조
	주무관			장대성

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

휴일 및 야간 작업계획 검토보고(2023년 9월)

2023. 9.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

휴일 및 야간 작업계획 검토보고(2023년 9월)

『진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사』와 관련하여 2023년 9월 휴일 및 야간 작업계획 승인 요청에 대하여 검토보고 함.

※ 관련서류 : 동명감 진접1 제2023-338(2023. 8. 28.)

□ 관련근거

ㅇ 공사계약 특수조건 제11조(휴일 및 야간작업)

ㅇ 건설사업관리 과업내용서 6.3 휴일 및 야간근무에 대한 건설사업관리대가 지급

- 야간근무는 주야간으로 산출된 공사비에 의거 건설사업관리대가를 산출하였으므로 추가 지급 제외

- 휴일근무는 필요시 적정인원을 배치하고 원인자가 건설사업관리대가 부담

□ 휴일작업 계획

ㅇ 세부내용

작업일	휴일 형태	작업위치	작업내용	관리자
				감리단	시공사
09월01일 (금)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월02일 (토)	휴무일	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******** ******** ******** ******** ******** ********
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월03일 (일)	휴일	- 작업구1 (환기구#1)	현장 및 양수관리	*	******** ******** ******** ******** ********
		- 작업구2 (환기구#2)	현장 및 양수관리
		- 작업구3	현장 및 양수관리

작업일	휴일 형태	작업위치	작업내용	관리자
				감리단	시공사
09월04일 (월)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3 (환기구#3)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월05일 (화)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월06일 (수)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	인입선 종점부 라이닝 5호기 제작 복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월07일 (목)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	인입선 종점부 라이닝 5호기 제작 복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월08일 (금)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	인입선 종점부 라이닝 5호기 제작 복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월09일 (토)	휴무일	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	인입선 종점부 라이닝 5호기 제작 복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월10일 (일)	휴일	- 작업구1 (환기구#1)	현장 및 양수관리	*	******** ******** ******** ******** ********
		- 작업구2 (환기구#2)	현장 및 양수관리
		- 작업구3	현장 및 양수관리

작업일	휴일 형태	작업위치	작업내용	관리자
				감리단	시공사
09월11일 (월)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 샌딩작업
		- 작업구3	인입선 종점부 라이닝 5호기 제작 복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월12일 (화)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근 및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	인입선 종점부 라이닝 5호기 제작 복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월13일 (수)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근 및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	인입선 종점부 라이닝 5호기 제작 복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월14일 (목)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	인입선 종점부 라이닝 5호기 제작 복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월15일 (금)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	인입선 종점부 라이닝 5호기 제작 복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월16일 (토)	휴무일	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	인입선 종점부 라이닝 5호기 제작 복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월17일 (일)	휴일	- 작업구1 (환기구#1)	현장 및 양수관리	*	******** ******** ********
		- 작업구2 (환기구#2)	현장 및 양수관리
		- 작업구3	현장 및 양수관리

작업일	휴일 형태	작업위치	작업내용	관리자
				감리단	시공사
09월18일 (월)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	인입선 종점부 라이닝 5호기 제작 복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월19일 (화)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	인입선 종점부 라이닝 5호기 제작 복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월20일 (수)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	현장 및 양수관리	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	현장 및 양수관리
		- 작업구3	현장 및 양수관리
09월21일 (목)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근 및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	인입선 종점부 라이닝 5호기 제작 복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월22일 (금)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	인입선 종점부 라이닝 5호기 제작 복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월23일 (토)	휴무일	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	*******	******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	인입선 종점부 라이닝 5호기 제작 복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치

작업일	휴일 형태	작업위치	작업내용	관리자
				감리단	시공사
09월24일 (일)	휴일	- 작업구1 (환기구#1)	현장 및 양수관리	*	******** ******** ********
		- 작업구2 (환기구#2)	현장 및 양수관리
		- 작업구3	현장 및 양수관리
09월25일 (월)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	인입선 종점부 라이닝 5호기 제작 복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월26일 (화)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	인입선 종점부 라이닝 5호기 제작 복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월27일 (수)	야간	- 작업구1 (환기구#1)	단선터널 상, 하선 인버트 콘크리트 철근및 거푸집 조립 횡갱 집수정 구조물 작업	******	******
		- 작업구2 (환기구#2)	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치 복선터널 라이닝 스틸폼 이동 및 셋팅
		- 작업구3	복선터널 측벽하부 콘크리트 거푸집 설치
09월28일 (목)	공휴일	- 작업구1 (환기구#1)	현장 및 양수관리	*	******
		- 작업구2 (환기구#2)	현장 및 양수관리
		- 작업구3	현장 및 양수관리
09월29일 (금)	공휴일	- 작업구1 (환기구#1)	현장 및 양수관리	*	******
		- 작업구2 (환기구#2)	현장 및 양수관리
		- 작업구3	현장 및 양수관리
9월30일 (토)	공휴일	- 작업구1 (환기구#1)	현장 및 양수관리	*	******
		- 작업구2 (환기구#2)	현장 및 양수관리
		- 작업구3	현장 및 양수관리

ㅇ 작업사유 : 공사의 연속성 확보 및 예정공정 추진

- 휴일근무는 필요시 적정인원을 배치하고 원인자가 건설사업관리대가 부담휴무일(토요일) 작업에 대해 대체휴무 실시, 휴일(일요일 및 공휴일) 작업에 대한 추가 비용은 시공사 부담

ㅇ 감리 근무계획 및 대체휴무 계획

구 분	근무일자	근 무 자	대체 휴무계획		비 고
			대체 휴무일	업무대행자
휴(무)일 근무 계획	********	******	*********	******	***
	********	******	*********	******	***
	*********	******	*********	*******	***
	*********	*******	**********	******	***

□ 건설사업관리단 검토의견

ㅇ 작업의 연속성 확보와 원활한 공정추진을 위해 휴일작업 시행이 필요함에 따라 관련규정 『서울특별시 공사계약 특수조건 11조(휴일 및 야간작업』에 의거 귀책사유가 시공사에 있어 건설사업관리대가는 시공사 부담이 타당함

ㅇ 또한, 시공사에서 요청한 휴일작업 시행에 따른 공사관리의 공백이 발생하지 않도록 평일과 동일하게 건설사업관리업무를 수행함이 적정하다고 판단됨

□ 조치계획

ㅇ 상기 건설사업관리단의 검토의견이 적정하다고 판단됨에 따라 아래와 같은 조건으로 2023년 9월 휴일 및 야간 작업계획에 대해 승인하고, 작업내용 등 변경사항 발생 시 사전보고 후 시행토록 조치하고자 함.

	승 인 조 건
◦ 작업 시 시공사 현장책임자는 관리자급으로 지정하고, 근무조 편성은 반드시 안전관리자를 포함하여 근무하도록 하여 안전사고예방 관리 철저 ◦ 중대재해처벌법 시행에 따라 산업재해 예방을 위한 자율점검표, 산재예방 매뉴얼 등을 적극 활용하여 先안전, 後작업 이행 철저 ◦ 위험성평가 실시 후 위험성 감소대책 이행 철저 ◦ 근로자 보호 기본사항 10대 항목 및 안전시공 기본사항 10대 항목을 준수하고 안전사고 발생 시 경미한 사항이라도 즉시 보고 ◦ 작업 시 신호수 배치 및 통행로 확보를 철저히 하여 시민 불편사항 최소화 ◦ 화재예방을 위해 지정장소 외 흡연금지, 위험물 보관소 및 가스용기 관리 철저 ◦ 건설기계·장비 또는 중량물 취급 작업시 건설사업관리기술자 확인 및 안전수칙 준수 철저 ◦ 풍수해 관련 안전사고가 발생하지 않도록 현장관리 철저 ◦ 코로나 19 확산 방지를 위한 건설공사장 대응지침 시행 철저 ◦ 휴일 작업에 따른 건설사업관리비는 시공사 부담, 휴무일 작업에 따른 건설사업관리단 근무자는 대체휴무 실시

붙임: 관련문서 1식.  끝.