문서번호	시설관리과-20390
결재일자	2023. 8. 31.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
임상근		이유찬	08/31
			이동욱
협조

설계변경(2차, 최종) 심의위원회 결과 보고

(2023년 평창동 등 8개동 상수도공사)

2023.  8. 30. (수)

중부수도사업소

(시설관리과)

설계변경(2차, 최종) 심의자료

가. 공 사 명: 2023년 평창동 등 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 제    목: 설계변경 심의(2차, 최종)

다. 일    시: 2023. 8. 30.(수) 16:30

라. 참 석 자: *************************************************************

마. 공사개요

구 분	구 경	연 장	비 고
당 초	********	******	-
변 경	********	****	감******

바. 계약기간: ***************************

사. 공사금액: 변동없음

구 분	설계변경 현황			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
도급비 (VAT포함)	************	************	*

아. 설계변경 심의내용: 아래 첨부

설계변경 심의내용

※ 관련문서: 시설관리과-20353(2023. 8. 30.)호

1. 공사 현황

가. 공 사 명: 2023년 평창동 등 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

구 분	구 경	연 장	비 고
당 초	********	******	-
변 경	********	****	*******

다. 계약기간: ***************************

라. 수 급 인: ***************

2. 설계변경 사유보고

가. 공사중 물량 증·감 사항 발생

- (물량 증) 인력터파기(견질 0~1m, 지세) 등 156개 공종

- (물량 감) 보도용블록 인력철거 등 599개 공종

- (신규) 주철직관 부설공(400mm, 야간) 등 54개 공종, 단산

- (신규) 1수1악 단관(400mm * 6t * 2.0m) 등 5개 자재

3. 설계변경 검토결과

가. 물량이 증·감한 일부공종에 대해 계약율을 적용 : 적정함

나. 도급액 범위내에서 물량변동 : 적정함

다. 신공종에 대해 낙찰율 적용 : 적정함

붙임  1. 설계변경 심의위원회 개최 보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 심의의견서 1부.

4. 제비율 검증확인서 1부.  끝.