문서번호	토목부-16269
결재일자	2023. 9. 1.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		이성주	09/01
			이임섭
협조
	주무관		이상현

- 성산대교 본교 성능개선공사 -

실정보고(통행선박 충돌방지 항로표지(등부표) 설치) 검토 보고

2023. 08.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 성산대교 본교 성능개선공사 -

실정보고(통행선박 충돌방지 항로표지(등부표) 설치) 검토 보고

공사용 예인선, 바지선과 통행하는 선박충돌 방지를 위한 항로표지

(등부표)설치 실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

□ 근    거

ㅇ 통행선박 충돌방지를 위한 항로표지 설치 실정보고(성산본교 23-128호, `23. 08. 29.)

ㅇ 항로표지법 제9조(항로표지의 설치·관리)

ㅇ 항로표지시설 관리지침 제10조(점검계획의 수립) "별표7"

□ 공사개요

ㅇ 사 업 명 : 성산대교 본교 성능개선공사

ㅇ 규    모 : 교량 성능개선(DB18→DB24, B=27.0m, L=880.0m)

ㅇ 총사업비 :********************************************************

ㅇ 사업기간 : `21. 01. 20. ∼ `25. 10. 25.

- *********************************************************************

- ****************************************************************

ㅇ 시 공 사 : *************

ㅇ 감 리 사 : *********

□ 실정보고 검토

	실정보고 내용
ㅇ **************************************** - 규 격 : ************** - 수 량 : ************************* - 위 치 : ********** ㅇ ******************** - 항로표지의 경우 상시 존치해야 하므로 공사 중 간섭구간 외부로 임시이설 후 공사 완료시 본이설 실시 - 수 량 : ***************** - ****************************

ㅇ 추진경위

- `22.02.24. : 지장물 이설협의(도기본→유관기관)

- `23.05.24. : 공사용 등부표 설치 및 허가 후 공사진행 협조요청

(인천지방해양수산청 항로표지과 → 도기본 교량건설과)

- `23.05.26. ~ : 인천지방해양수산청 항로표지과 허가사항 협의

(등부표 설치위치, 규격, 수량 등)

ㅇ 항로표지 이설 및 등부표 설치 위치도

***************************

<항로표지 설치 현황>

******************************************************

<등부표 상세도>

*****************************************

ㅇ 등부표 비교검토

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

******************************************************

*******************

***************************************************

***********************************

ㅇ 수량 증·감 내역

***************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 공사비 증·감 내역 ***********

(단위:천원)

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 신규 단가 협의

- 협 의 일 : `23. 08. 25.(금)

- 참 석 자 : ****************************

- 협의결과 : *******

공 종	시공사(안)	발주처(안)	적 용
항로표지(등부표) 설 치	*********************	**************	************** ************

□ 검토결과 및 조치계획

ㅇ 유관기관 협의사항 반영 및 공사 중 선박충돌 방지를 위한 항로표지

(등부표) 설치는 적정한 것으로 판단되며 향후 설계 변경에 반영 하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리단 실정보고서 1부.끝.