젊은경제·바른행정·신속성장, 바로 서대문!
		서 대 문 구
수신자		내부결재
(경유)
제목	설계변경(제1회)시행[2023년 지하주택 침수방지시설 설치공사(연간단가)]

우리 구에서 시행중인 『2023년 지하주택 침수방지시설 설치공사(연간단가)』에 대하여 다음과 같이 설계변경(제1회)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2023년 지하주택 침수방지시설 설치공사(연간단가)

2. 공사기간 : 2023. 4. 24. ~ 2023. 11. 30.

3. 계약상대자 : (주)테크원이앤씨 *******

4. 설계변경 사유

- 서울시 1·2·3·4단계 지하주택 전수조사 후 침수방지시설이 필요한 가구에 대한 추가 설치 물량 및 개인신청 증가분 반영

- 재난관리기금(구비 및 시비) 사용계획 및 심의결과 원안가결을 통해 정비예산을 추가 확보하였으며 이에 따른 공사비 증액 및 단순물량 증가

※ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부예규) 제9장 제6절
▷ 발주기관의 필요에 따른 공사 설계변경 통보(해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생)

❍ 주요물량 변경사항

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증・감		비고
역 류 방 지 기	Ø50,Ø65, 바닥	개소	115	44	감)	71
	Ø75, 바닥	개소	65	44	감)	21
	Ø100, 바닥	개소	10	79	증)	69
	Ø50,세탁/세면	개소	5	52	증)	47
	소1구, 씽크대	개소	15	63	증)	48
	소2구, 씽크대	개소	15	6	감)	9
	대1구, 씽크대	개소	10	2	감)	8
	Ø100, 좌변기	개소	5	37	증)	32
	현장 조사	가구	150	330	증)	180
	소 계		240	327	증)	87
물 막 이 판	제작·설치	m	660	981	증)	321
	지주 설치	개소	250	1,166	증)	916
	바닥 보강	m	165	980	증)	815
	현장 조사	가구	-	1,008	증)	1,008
	소 계		660	981	증)	321

5. 공사비

❍ 공사금액 변경현황

(단위: 원)

공 종		당 초	변 경	증・감		비고
총 공 사 비		261,450,600	561,450,600	증)	300,000,000
도 급 비	공급가액	237,682,364	510,409,636	증)	272,727,272
	부가가치세	23,768,236	51,040,964	증)	27,272,728
	소계	261,450,600	561,450,600	증)	300,000,000

6. 예산과목

(단위: 천원)

구 분	세 부 사 업	예 산 액	비 고
구 기금	재난안전과, 안전도시 서대문 구현, 재난대비 복구체제 강화, 재난예방활동 및 응급복구, 시설비 및 부대비, 시설비	300,000
시 기금	안전총괄실 안전총괄과, 재해 및 재난예방, 재난 예방 및 복구, 재난예방, 시설비 및 부대비, 시설비	300,000
계		600,000

붙  임   1. 공사 설계변경(제1회) 검토보고 1부.
2. 설계변경 사유서 1부.
3. 설계변경 내역서 1부.
4. 제비율 검증확인서 1부.
5. 합의각서 1부.
6. 설계변경계약심사, 일상감사, 설계변경심사위원회 결과 회신 각 1부.
7. 재난관리기금 사용계획 1부.
8. 재난관리기금 심의결과 각 1부.  끝.

주무관	박지윤		하수팀장	전하현		치수과장	시희식		안전건설국장	김태중
부구청장	진경식		구청장	09/01
이성헌
협조자	주무관	오정환		재난관리팀장	이숙영		재난안전과장	김상식
주무관	양지숙		계약팀장	문혜선		재무과장	하인철		기획재정국장	강환복
시행	치수과-17493	(	2023. 9. 1.	)	접수		(		)
우	03718	서울 서대문구 연희로 248	/	https://www.sdm.go.kr
전화	02-3140-8317	/전송	02-330-8945	/이메일	jyoonb@sdm.go.kr	/	부분공개(5)