아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	총무과장
(경유)
제목	관급자재(분전반) 납품기한 변경 요청 [한강공원 조명시설 유지보수공사]

1. 한강공원 조명시설 유지보수공사에 소요되는 관급자재와 관련입니다.

2. 계약 체결된 관급자재(분전반)에 대하여 아래와 같이 납품기한 변경을 요청하오니

처리하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 변경

납 품 요구번호	물품식별 번 호	품명/규격	수량	납품 기한		비 고
				당 초	변 경
******** ********	********	*** ******	**	2023. 9.30.	2023.10.31.
	********	*** *****	**
	********	*** *****	**
	********	*** *****	**

나. 변경사유 : 현장 여건에 따른 관급자재 납품시기 미도래

붙 임  분할납품요구서(계약) 1부.  끝.

	기 전 설 비 과 장
주무관	이재돈		기전설비과장	09/05
김진보
협조자	주무관	백지원
시행	기전설비과-1977	(	2023. 9. 5.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, (성수동1가 642-25)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0672	/전송	02-3780-0744	/	leejdkk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)