문서번호	방재시설부-10585
결재일자	2023. 9. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김재웅		정현중	09/04
			이동훈
협 조
	주무관			김광호

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 중첩, 잔여구간 -

건설폐기물 처리용역 실정보고 검토(2차분)

2023. 9.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 중첩, 잔여구간 -

건설폐기물 처리용역 실정보고 검토(2차분)

「국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 중첩, 잔여구간 건설폐기물 처리용역(2차분)」실정보고 사항에 대하여 검토결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 이산2023-국회대로(건)-229호(2023.08.31.)

1		공사개요

ㅇ 위    치 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 중첩·잔여구간

ㅇ 용역기간 : ‘20.06.23.~‘24.12.31.(2차 : ‘22.11.11~‘24.12.31)

ㅇ 용 역 비 : 금380,274,600원(일금삼억팔천이십칠만사천육백원정)
※ 2차 금199,567,600원

ㅇ 계 약 자 : 주식회사 건용환경개발

2		보고내용

ㅇ 변경사유

- 잔여구간 경인제2지하차도(화곡지하차도) 철거 발생 폐기물 우선처리

ㅇ 변경내용

구 분			변 경 현 황			비 고
			당초	변경	증(감)
물량	총차	폐콘크리트	1,914ton	4,994ton	3,080	금액변경없음
		폐아스콘	9,740ton	6,808ton	(2,932)
		혼합폐기물	21ton	0ton	(21)
	2차	폐콘크리트	1,379ton	4,459ton	3,080
		폐아스콘	4,728ton	1,796ton	(2,932)
		혼합폐기물	21ton	0ton	(21)
금액	총차		380,274,600원	380,274,600원	0
	2차		199,567,600원	199,567,600원	0
폐콘크리트 추가(발생)위치			국회대로 중첩,잔여구간 → 경인 제2지하차도(화곡지하차도)

3		건설사업관리단 의견

ㅇ 당초 계약물량(2차분)의 위치는 중첩구간의 CIP깨기, 배수관, 우수받이, 경계석 및 잔여구간의 경계석, 세륜세차시설, 포장깨기였으나 공정계획변경 및 공사시기 미도래에 따라,

ㅇ 경인제2지하차도(진흥중공업 계약물량)을 우선처리하고 추후 중첩구간 발생물량(건용환경개발 계약물량)은 진흥중공업 계약물량으로 변경하고자 함.

4		보고자 의견

ㅇ 금액의 변경없이 공정진행 순서에 따라 발생하는 폐기물을 형상에 따라 수량 변경하여 실정보고한 사항으로, 건설사업관리단으로부터 제출된 변경된 폐기물의 수량산출서 및 내역서는 검토결과 적정하다고 판단됨.

ㅇ 추후 중첩구간에 발생되는 물량(건용환경개발 계약물량)에 대해서는 진흥중공업에서 물량 누락없이 계약하도록 철저한 관리가 필요함.

ㅇ 금회 실정보고 사항에 대해서는 승인조치하고 추후 설계변경(처리량 정산) 시행코자 함.

붙임 : 실정보고서 1부.  끝.