문서번호	서울숲관리사무소-6591
결재일자	2023. 9. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
운영팀장	서울숲관리사무소장	동부공원여가센터소장
양혜정	하종식	09/05
		김인숙
협 조
	여가협력팀장		김화시
	공원조성팀장		호명옥
	시설팀장		박계현

「사슴사 환경개선 및 무장애관찰로 조성사업」

예비 준공검사 시행계획

2023. 9.

동부공원여가센터

(서울숲관리사무소)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「사슴사 환경개선 및 무장애관찰로 조성사업」

예비 준공검사 시행계획

우리 센터에서 시행중인『사슴사 환경개선 및 무장애관찰로 조성사업』와 관련, 시공품질을 제고하기 위한 사전 준공검사를 아래와 같이 추진하고자 함.

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 사슴사 환경개선 및 무장애관찰로 조성사업

❍ 공사기간 : 2023. 5. 26. ~ 9. 22.

❍ 공사위치 : 서울숲 생태숲(사슴사주변)

❍ 공사내용 : 사슴사 관찰로 정비, 분뇨처리장설치, 사슴놀이시설설치, 휴게쉼터 바닥정비, 수목식재 등

❍ 총공사비 :**************

*****************************************************

❍ 도 급 사 : 주원조경(주) 대표 최정우

❍ 공사감독 : 서울시설관리공단 공사감독3처

❍ 공 정 율 : 90%

Ⅱ		예비준공검사 개요

❍ 일    시 : 2023. 9. 11. (월) 10:30(예정)

❍ 참 석 자 : 총 7명

************************************

****************************************

************************************

❍ 검사방법 : 공사도면과 현장실사 비교

❍ 검사내용

- 주요 공정별 시공 및 마감상태 검사

- 시설이용자 입장에서 안전성 확보여부 검사

- 관리의 용이성에 대한 위해 요소 여부 점검

Ⅲ		향후계획

❍ 2023.9.11.: 지적사항 보완 (지적사항 보완에 대한 검사는 서울시설공단에서 준공검사 시 시행)

❍ 2023.9.13.: 설계변경 시행

❍ 2023.9.22.: 공사 준공.  끝.