문서번호	여성가족과-21460		주무관		보육행정담당	여성가족과장		복지교육국장
결재일자	2023. 9. 5.		박재면		박순명	강영숙		09/05
공개여부	부분공개(5)							임근수
방침번호			협조
방침번호

- 국공립어린이집(길음빛, 목화, 장위1동) 그린리모델링 -

건축,기계공사 발주 계획

2023. 9.

복지교육국

(여성가족과)

- 국공립어린이집(길음빛, 목화, 장위1동) 그린리모델링 -

건축,기계공사 발주 계획

국공립어린이집(길음빛, 목화, 장위1동) 그린리모델링 공사를 통해 공공건축물 에너지소비량 절감 및 쾌적한 보육 환경을 조성하고자 함

Ⅰ		추진근거

□「녹색건축물 조성 지원법」 제27조 (그린리모델링에 대한 지원)

□「그린리모델링 지원사업 운영 등에 관한 고시」

□ 2023년 국공립어린이집 그린리모델링 추진계획 (여성가족과-1983, 2023.1.27.)

□ 국공립어린이집 그린리모델링 공사 계획 (여성가족과-14175, 2023.6.2.)

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : 국공립어린이집 그린리모델링 사업

□ 위    치 : 성북구 길음1동, 월곡2동, 장위1동 (3개소)

어린이집	위치	면적	사업비
길음빛	길음로 92(길음1동)	397.39㎡ (지상1층)	237,546
목화	오패산로4길 39-1(월곡2동)	418.27㎡ (지상3층)	144,439
장위1동	월계로32길 15(장위동)	587.27㎡ (지하1층, 지상1층)	138,547

□ 총사업비 : 520,532천원

□ 사업(예정)기간 : 2023. 3. ~ 12.

□ 예산과목 : 보육·가족복지 증진, 어린이집 기능보강 지원, 국공립             어린이집 그린리모델링 사업, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		추진현황

□ 2023. 6월 : 설계용역 계약 및 착수 (3개소)

□ 2023. 7월 : 설계용역 준공 (3개소)

□ 2023. 8월 : 공사 일상감사 완료

Ⅳ		공사시행계획

□ 공 사 명 : 국공립어린이집(길음빛, 목화, 장위1동) 그린리모델링 건축,기계 공사

□ 발주방식 : 단독도급

□ 예정기간 : 착공일로부터 60일

□ 공사범위 : 건축,기계공사 전반

□ 예정공사비 : *********

❍ 도급공사비 : *********   ❍ 관급자재비 : ********

□ 공사발주 금액 현황

구 분	도급공사비 (원)	도급자관급 (원)	관급자관급 (원)	합 계(원)	구성비율 (도급기준)
건축,기계 공사	***********	*	**********	***********	****

【비고】 분야별 예정공사비 편성 현황

(단위: 천원)

구 분	총 공사비	건축, 기계공사	전기공사	비고
도 급 비	***********	***********	**********	전기공사 : 2개소(길음빛, 목화)
관 급 비	**********	**********	*
합 계	***********	***********	**********

※ 전기는 개별 법령 등에 따라 별도 발주

※ 공종별 관급자재 발주는 도급공사 낙찰차액 활용하여 발주예정

Ⅴ		공사발주계획

□ 입찰방식 : 전자공개 수의계약

□ 입찰참가자격

❍ 「건설산업기본법」 제16조 및 동법 시행령 제7조에 의한 종합건설업을 등록한 자로서 입찰에 참여.

❍ 입찰참가자는 입찰공고일 전일부터 입찰마감일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재하는 업체로 제한.

□ 현장설명 실시여부 : 입찰기간 단축을 위해 설계도서 열람으로 대체

❍ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제15조제3항

□ 입찰에 관한 서류의 열람 및 교부

❍ 지정정보처리장치 게재로 대체.

❍ 조달청 국가종합전자조달시스템 홈페이지(www.g2b.go.kr)에 등록된 첨부자료로 대체.

□ 낙찰자 결정방식 : 시설공사 적격심사 세부기준 적용

❍ 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」제2장 시설공사 적격심사 세부기준 적용

□ 그 밖의 입찰에 부치는 사항

❍ 계약상대자는 기초금액에 반영된 아래 5가지(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비) 금액에 대해 산출내역서 작성 및 제출 시 조정 없이 반영하여야 하며,

국민건강 보 험 료	국민연금 보 험 료	노인장기 요양보험료	퇴직공제부금비	산업안전 보건관리비
**********	**********	********	**********	**********

❍ 계약내역서(산출내역서)에 반영된 상기 금액에 대해서는 준공검사시 납입확인서, 사용내역서, 지출영수증 등 관련증빙서류를 제출하고 감독공무원의 검사를 필히 받아야 하며 관련 법령 규정에 따라 정산하여야 함.

Ⅵ		향후일정

□ 2023. 9월 : 입찰공고 의뢰

□ 2023. 9월 : 낙찰 및 계약

□ 2023. 9월 : 공사 착공

□ 2023. 10월 : 공사 준공

붙 임 : 1. 공사설명서 1부.

2. 발주예정 내역서 1부.

3. 도면 각 1부.  끝.