문서번호	서울숲관리사무소-6606
결재일자	2023. 9. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
운영팀장		서울숲관리사무소장
양혜정		09/06
		하종식
협 조

사슴사 환경개선 및 무장애관찰로 조성사업

공사 실정사항에 따른 검토보고

2023.  9.

동부공원여가센터

(서울숲관리사무소)

사슴사 환경개선 및 무장애관찰로 조성사업

공사 실정사항에 따른 검토보고

「사슴사 환경개선 및 무장애관찰로 조성사업」과 관련하여 감독처로부터 실정보고가 있어 적정성을 검토하고 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 사슴사 환경개선 및 무장애관찰로 조성사업

○ *********************

**********************************

**************************

Ⅱ		실정보고 검토내용

○ 발주처 요청 사항

[서울숲관리사무소-4881(2023.07.07.), 서울숲관리사무소-6411(2023.08.30.)]

구분	발주처지시사항	검토결과	비 고
식재공사	◼토사유실방지 및 경관향상을 위한 경사면 식재요청	◼경사면 식재 반영 ▸산수국(H0.4xW0.6) : 0 → 1,550주 ▸맥문동(8cm) : 0 → 2,855 본 ▸줄사철매트식재 : 0 → 48.5㎡	서울숲관리사무소-6411 (230830)
시설물공사	◼분뇨성분의 외부 유실 방지를 위한 분뇨처리장방수요청	◼분뇨처리장 방수 반영 ▸방수 : 0 → 1식	서울숲관리사무소-6411 (230830)
	◼놀이시설 목재 규격은 사슴놀이에 맞추어 조정필요 (사슴사관계자요청사항)	◼사슴놀이시설 목재 규격 조정 반영 ▸사슴놀이시설A(Φ150xH2000): 2개소→0 ▸사슴놀이시설A-1(Φ130xH2000) : 0 → 2개소 ▸사슴놀이시설B(W2000xH1500): 2개소→0 ▸사슴놀이시설B-1(Φ130xW2000xH1500) : 2개소 → 0
	◼녹각전시장은 전면이 관람 가능한 개방형 형태의 전시장으로 변경요함	◼전면 관람형 녹각전시장으로 변경 ▸녹각전시장(2100x1090xH2500):1개소→0 ▸녹각전시장-1(1700x1150xH2500):0→1개소
포장공사	◼사슴사 진출입로 노후콘크리트 포장 철거 후 인조화강석 블록포장 및 주변부 재포장 요청	◼인조화강석블럭 포장 등 물량 반영 ▸인조화강석블록포장(200x200xT80,투수) : 0 → 42.24㎡ ▸인조화강석블록재설치(200x200xT80,투수) : 0 → 43.64㎡	서울숲관리사무소-6411 (230830)
	◼주도로, 일부간 마사토 포장 요청	◼주도로 및 일부구간의 마사토포장 반영 ▸마사토포장A(T80) : 0 → 690㎡ ▸마사토포장B(T100) : 0 → 11㎡

나. 현장 실정사항

[회의록(230612), 회의록(230724),서울숲관리사무소-4881(2023.07.07.)]

구분	현황 및 문제점	검토결과	비 고
철거 공사	◼사슴사 내부 수목 현황이 도면과 상이	◼현장여건에 맞게 물량 조정 ▸수목보호장치(철거)(Φ50xH1400) : 55개소 → 58개소 ▸수목보호장치(Φ150xH2000) : 55개소 → 59개소	회의록 (230724)
	◼철거 및 설치 대상인 트랜치덮개의 상태가 양호	◼현장 내 존치로 철거 및 설치 본공사 물량 제외 ▸트랜치덮개(철거)(W300xH50):133m → 0 ▸트랜치덮개(W300xH50) : 133m → 0	회의록 (230724)
	◼사고석 경계석(철거) 물량이 도면과 상이함	◼현장여건에 맞게 철거 물량 변경 ▸사고석경계석(철거)(T100) : 118.5m → 127.87m	회의록 (230612) 기승인
토공사	◼인조화강석블럭포장 하부에 되메우기 토공 물량이 누락됨	◼현장내 발생한 잔토 재활용으로 포장 하부구간에 되메우기 하며 그에 따른 토공사은 물량 제외 ▸토공사(B.H.0.7) : 63.56㎥→ 0 ▸토사운반B.H0.7+24DT(현장~매립지) : 63.56㎥ → 0	회의록 (230612) 기승인
식재공사	◼시설물계획변경에 따른 식재계획 조정필요	◼옹벽선형 조정 및 식재 위치 조정에 따른 식재계획 물량 조정 ▸말채(윈터뷰티)(H0.4): 300주 → 500주 ▸말채(케슬렝기)(H0.4): 200주 → 0 ▸말채(켈세이)(H0.4): 200주 → 0 ▸식재면고르기 : 0 → 202㎡	회의록 (230612) 기승인
시설물공사	◼수목현황이 도면과 상이하여 보호덮개 추가 설치 필요	◼수목 현황을 반영한 수목보호덮개 물량 조정 ▸수목보호덮개(1400x1400):14개소→18개소	회의록 (230724)
	◼무장애램프 경사 및 휠체어 이용폭 확보 위한 포장 계획 조정 필요	◼무장애경사로, 휠체어 폭 확보를 위한 포장 계획 변경 ▸램프(3865x2500xT30,멀바우) :1개소 → 0 ▸인조화강석블록포장(200x200xT60,투수) : 280.5㎡ → 259.79㎡ ▸바이크엣지(H100xW60xT2):122.5m→154.2m	회의록 (230612) 기승인 회의록 (230724)
	◼옹벽 설치 구간중 일부는 하부에 수목뿌리가 존재하여 기 계획된 H700옹벽 시공시 수목 뿌리 파손•고사가 예상됨	◼수목 뿌리 보호를 위한 일부 구간의 콘크리트 옹벽 설치 높이 및 선형 조정 ▸콘크리트블록옹벽(W300xH700) : 151m → 116.3m ▸콘크리트블록옹벽B(W300xH450) : 0 → 36.33m ▸콘크리트블록옹벽C(W300xH600) : 0 → 15.16m	회의록 (230612) 기승인
	◼콘크리트옹벽 및 인조화강석블럭 설치계획 조정에 따른 부대 시설물 물량 변경 필요	◼시설물 계획 조정에 따른 부대공사 물량 조정 ▸안전휀스(W1500xH800):97.5m → 82m ▸볼라드(D146xH850) : 8개소→ 12개소 ▸잔디수로(W500) : 26m → 23m ▸흙유실방지 : 0 → 116.3m	회의록 (230612) 기승인
	◼목교 설치구간 현황이 도면과 상이하여 설치 너비 조정 필요	◼현황에 맞추어 목교 설치면적 조정 ▸목교(6000x1400xT30,멀바우):2개소 → 0 ▸목교-1(6000x1500xT30,멀바우):0 → 2개소	회의록 (230724)
	◼데크철거로 하부 매설된 미설치 시설(측구, 트렌치 등) 노출	◼노출 시설물의 설치 물량 반영 ▸트랜치그레이팅설치(W300xH50):0 →11m	회의록 (230724)
관급 자재	◼현장 내 변경으로 인한 관급자재 수량 조정	◼관급자재 수량 조정 반영 1)관급자 관급자재 ▸볼라드(현장설치도,D146x855mm,앵커식) : 8개소 → 12개소 ▸그레이팅덮개(300x997x9mm) : 0 → 42m 2)도급자 관급자재 ▸줄사철식물매트(340x500) : 0 →267본 ▸수목보호덮개(1400x1400x30) : 14개소→18개소 ▸수목보호틀(60x60x1000) : 79m → 101.4m ▸안전휀스(W1500xH800) : 98m → 84m ▸콘크리트블록옹벽(본체블록) (W230xL 250xH150) : 134㎡ → 122㎡ ▸인조화강석블록(200x200xT60,투수) : 292㎡→265.2㎡ ▸트랜치덮개(300x1000x50mm):133개→0
부대 공사	◼현장과 상이에 따른 철거물량 변경에 따른 폐기물 처리 물량 변경	◼폐기물 처리 물량 조정 ▸건설폐기물처리비(폐콘크리트) : 47.83ton→64.65ton ▸건설폐기물수집운반비(24톤덤프트럭, 30km(폐콘,폐아스콘,건폐) : 47.83ton → 64.65ton	회의록 (230612) 기승인

Ⅲ		개략공사비

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급액	****	***********	***********	**********
	***	**********	**********	*********
	****	***********	***********	***********
관 급 액		**********	**********	***********
총 공 사 비		***********	***********	*********

※ 상기내용은 개략적인 물량과 금액이며 시공 시 현장상황에 따른 일부 경미한 변경사항은

설계변경 시 반영.

Ⅳ		조 치 의 견

○ 상기 검토 내용에 대하여 감독처에 승인 및 통보하고 공사 속행, 향후 설계변경·정산하여 사업시행

붙임  1. 실정보고 공문 1부.

2. 변경 내역서 1부.  끝.