문서번호	도로보수과-9138
결재일자	2023. 9. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
박해웅	신준식	09/07
		임대운

'23년 하반기 굴착복구 및 사후정비공사 추진 계획

2023.09.08.

동부도로사업소

(도로보수과)

'23년 하반기 굴착복구 및 사후정비공사 추진 계획

2023년도 도로굴착복구기금(시설비) 추가 재배정에 따른 굴착복구공사 및 사후정비공사 추진 계획을 수립하여 보고드림

	1		추진근거

❍「서울특별시 도로굴착복구기금 설치 조례」제5조(기금의 용도)

❍ '23년 도로굴착복구기금(사후정비비) 재배정 알림

[도로관리과-3236호(2023.08.25.)]

❍ 2023년 도로굴착복구기금 운용계획변경 회의(2023.09.01.)

	2		추진방향

❍ 특별시도 도로굴착복구 구간의 도로평탄성 유지를 위한 품질 강화

❍ 굴착복구공사 구간 차로단위 정비 시행으로 도로기능 정상화

❍ 소규모 공사는 표층확폭복구 시행으로 평탄성 제고

❍ 굴착복구공사와 사후정비공사를 통합 발주 시행

	3		세부 추진계획

❍ 기본 방향

- 노후포장 정비대상 중복여부 및 기타사업(비관리청) 중복여부 검토

- 2023년 도로굴착 사업계획(하반기)에 따른 복구 대상 선정

❍ 예산사용 계획

(단위:천원)

구 분	계	포장공사	노면표시공사	폐아스콘처리
합 계	3,680,000	3,145,500	308,000	226,500
직접복구비	1,910,000	1,738,700	110,000	61,300
사후정비공사	1,770,000	1,406,800	198,000	165,200

※ 노면표시공사 및 폐아스콘처리용역은 기 시행중인 공사/용역에 포함 시행

❍ 공사개요

- 공사기간: 착공일로부터 2023.12.26.까지

- 공사구간: 사업소관내(강남구, 송파구, 강동구, 서초구 일부)

- 공사규모: 굴착복구(t=80cm) A=37a, 차로복구(t=5cm) A=214a.

절삭후 재포장(t=5cm) A=588a.

- 소요예산: 3,680백만원(도급비 1,999. 관급비 1,130. 이전비 551)

❍ 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구(도로굴착복구기금), 도로굴착

복구공사. 시설비 및 부대비, 시설비(401-01).

	4		행정사항

❍ 사전절차 이행

- 전문공사 발주사업 사전 검토(건설혁신과) 및 일상감사(공공감사담당관) 의뢰

※ 전문공사 발주 사전검토 : 2억이상 전문공사(상반기 사전검토로 제외)

※ 일상감사 : 10억이상 전문공사 및 용역, 5억이상 물품구매

※ 계약심사 제외('23년 한시적 계약심사 제외 대상사업)

붙임  1) 설계도서 1부.

2) 공사 위치도 1부.

3) 23년 도로굴착복구기금(사후정비비) 재배정 알림 1부.

4) 회의자료 1부.  끝