문서번호	기전과-10284
결재일자	2023. 9. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
주현탁		09/07
		최경주
협 조

「원효대교 가로등 개선공사 실시설계 용역 추가 실정보고서」 변경 보고

「원효대교 가로등 개선공사 실시설계 용역 추가 실정보고서」

변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 09.

서부도로사업소

(기  전  과)

「원효대교 가로등 개선공사 실시설계 용역 추가 실정보고서」

변경 보고

서부도로사업소장 : 최연우☎300-8300 기전과장 : 최경주☎8390 담당 : 주현탁☎8404

「원효대교 가로등 개선공사 실시설계 용역」계약 상대자인 (주)유로컨설팅으로부터 접수된 추가 실정보고서를 검토 결과, 변경사항이 발생하여 결과를 보고하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

❍ 「원효대교 가로등 개선공사 실시설계 용역 추가 실정보고서」검토 보고

(기전과 - 10254호, '2023. 9. 6.)

Ⅱ		개 요

□ 사업개요

❍ 계 약 명 : 원효대교 가로등 개선공사 실시설계 용역

*****************************************

❍ 계약방법 : 여성기업 1인 견적 수의계약

************************************

❍ 계 약 일 : 2023. 4. 12.

❍ 착 수 일 : 2023. 4. 12.

❍ 계약기간 : 2023. 4. 12. ~ 2023. 9. 30.

❍ 완수기한 : 2023. 9. 30.

❍ 주요 과업내용

- 가로등 조명, 전기공사 설계내역서 작성 및 CAD도면 산출

- 적합한 조도, 균제도, 휘도, 부하계산등을 고려한 시뮬레이션 검토

- 관련 법령과 기준에 적합한 도로 조명 검토

Ⅲ		현장 실정사항

□ 실정사항

❍ ('2023. 6. 7.) 도로시설과 회의 결과, 낮은 가로등 도입 전

일정 기간동안 샘플 테스트 및 시민 의견 수렴 필요성을 제기하였음.

❍ 또한, 샘플 테스트 시행 중 조명 전문가들의 의견도 중요하다고 생각하여한국조명전기설비학회 및 한국조명디자이너 협회의 조명 디자이너들에게 의견수렴을 요청하는 것이 필요하여 기존 설문조사 대상을 아래와 같이 변경하고, 설문조사 대상자에 대한 인센티브 지급에 따라 설계변경이 필요한 실정임.

대상	수량		인센티브	비고
	기존	변경
****	**	**	** *******	******* *******
*****	***	**	*** *******
*******	*	**

□ 변경금액

❍ 설문조사 인센티브 지급 : ************

(단위 : 원)

구 분	변 경 전 (A)	변 경 후 (B)	최종 변경금액 (C = B - A)
총 소요예산	**********	**********	1********

Ⅳ		실정사항 검토

□ 검토의견

❍ 낮은 가로등 샘플 구간에 대해 기존 설문조사 대상에 조명 디자이너들을

추가하여 전문가 및 다양한 의견을 청취하여 가로등 시공방식을 결정하고,

❍ 실시설계 용역 계약상대자인 (주)유로컨설팅의 실정보고서의 내용을 검토한 바 계약 금액을 위의 변경금액으로 변경하고자 함.

❍ 상기 실정보고 사항에 따라 승인 회신한 후, 변경계약을 추진하고자 함.

Ⅴ		향후계획

❍ 설계변경 계약 의뢰 → 관리단속과

붙임  1. 실정보고서 공문 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.