문서번호	건축부-14720
결재일자	2023. 9. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
김동석		김선경	전결 09/07
			이형재
협조
	체육시설팀장		장병균

『서울 어울림체육센터 건립공사』

제1회 설계변경으로 인한 계약금액 조정 검토 보고

2023.  9. 6. (수)

도시기반시설본부

(시설국 건축부)

『서울 어울림체육센터 건립공사』

제1회 설계변경으로 인한 계약금액 조정 검토 보고

『서울 어울림체육센터 건립공사』제1회 설계변경으로 인한 계약금액 조정 신청 검토 보고가 건설사업관리용역사업자부터 제출되어 적정여부를 검토하여 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 위    치: 서울특별시 노원구 상계동 1268

ㅇ 규    모: 지하 2층 / 지상 3층, 연면적 14,779.98㎡

(수영장 10레인, 볼링장 32레인, 다목적 체육관 등)

ㅇ 계약금액: 금 24,610,000천원 (1차: 금 6,652,508천원)

ㅇ 공사기간: '22. 7. 25.~'25. 7. 7. (35개월)

*****************************

ㅇ 시 공 사: ㈜코원건설 외 1개사(건축, 토목, 조경)

ㅇ 건설사업관리용역사: ㈜토문엔지니어링 건축사사무소 외 2개사

ㅇ 공 정 율: 25.0%

□ 추진경위

ㅇ '19. 12. ~ 21. 5.   : 설계용역 실시

ㅇ '22. 7. 29.   : 공사 계약

ㅇ '22. 7. 25.   : 공사 착공(건축, 토목, 조경)

ㅇ '23. 7. 27.   : 제1회 설계변경자문 소위원회 개최(조건부 가결)

ㅇ '23. 8. 18.   : 제1회 물가변동 외부전문가 자문 시행(적정)

ㅇ '23. 8. 24.   : 제2회 설계변경자문 소위원회 개최(조건부 가결)

ㅇ '23. 7. 현재  : 토목 토공사(토사반출 및 가시설 설치) 중

□ 설계변경 내용

ㅇ 관련근거 등

-『제1차 1,2회 소위원회 및 1회 물가변동에 따른 공사계약 변경요청 적정성 검토』토문 제2023-1533호(2023. 9. 5.)

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제9장 계약일반조건 제6절(공사설계 변경)

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

-『제1차 1,2회 소위원회 및 1회 물가변동에 따른 공사계약 변경요청』코원어울림-제2023-09-01호(2023. 9. 4.)

*******

***********************************

**	**	*******	**
*	*****************	*********************	*** **
*	******************	*********************
*	*****************	*********************
*	************************	*********************
*	**************	*********************
*	************	*********************
*	*******************	*********************
*	*******************	*********************
*	*******************	*********************
**	****************	*********************
**	*************	*********************
**	****************	*********************

*****************************************

********************************************

***********************************

**	**	*******	**
*	*****************	*********************	*** **
*	***************************	*********************
*	*****************	*********************

***********

****	****	****	*******	**
**	***************	***************	*********************
***	**************	**************	****

*********************************************

****		****	****	*******	**
* *	****	***************	***************	*********************
	****	**************	**************	*********************
	****	************	************	*********************
	**	*	************	**********************
********		***************	***************	***********************

ㅇ 공사기간 변경: 변동 없음

ㅇ 예산과목: 도시기반시설본부 건축부, 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확충, 서울 어울림체육센터 건립, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 관광체육국 체육정책과)

ㅇ 책임건설사업관리기술인 검토 의견

*****************************************************************

□ 처리의견

ㅇ 건설사업관리용역사업자의 검토 의견이 적정하여 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 시행하고자 함.

붙임: 1. 제1차 1,2회 소위원회 및 1회 물가변동에 따른 공사계약 변경요청 적정성 검토보고 1부.

2. 설계변경 내역서(총차, 1차) 각 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.