의원 요구 자료 제출

시 행	문화시설과-7549	(	2023. 9. 8.	)
접 수		(		)
결재일자	2023. 9. 8.
공개여부	부분공개(5)
수 신 자	수신자 참조
수신자	기획담당관, 문화정책과장

주무관	문화시설3팀장	문화시설과장	문화본부장		결재
김한종	최우진	황승일	09/08
			최경주
협 조
	건축부장			이형재

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 2340번, 김영호의원, 교육위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

김영호 국회의원(교육위원회,더불어민주당, 서대문구을)

요구번호 : 2340

1. 서울시립도서관(서대문) 건립 관련

1) 서울시립도서관(서대문) 건립 진행 현황

- 추진현황 및 향후계획(단계별 사업내용 및 사업기간)

2) 서울시립도서관(서대문) 건립 설계

- 설계업체 / 설계도안 / 비용 / 공모 관련 자료 일체

1. 의원님께서 요구하신 자료를 아래와 같이 제출 합니다.

※ 주관부서 : 문화본부 문화시설과 / 지원부서(설계 및 공사) : 도시기반시설본부 건축부

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 서대문구 북가좌동 479(3,486㎡, 시유지)

ㅇ 규    모 : 지하1층/지상5층, 연면적 9,058㎡

ㅇ 주요시설 : 어린이·일반 열람실, 자동화서고, 멀티미디어 자료실 등

ㅇ 사업기간 : 2019년 ~ 2027년

ㅇ 사 업 비 : 60,297백만원 (토지비 12,355백만원 포함)

□ 추진경과

ㅇ ’19. 7.            서북권 도서관 분관 기본계획

ㅇ ’19. 9.	市 투자심사(2단계 조건부 추진)

ㅇ ’20. 3.~4.          공유재산심의 및 공유재산관리계획 의결

ㅇ ’21. 8. 6.           기부금(300억) 약정식 (MBK 파트너스 김병주 회장)

ㅇ ’21. 10. 27.       서울시립도서관(서대문) 조성 추진계획 수립

ㅇ ’21. 12.~ ’22. 9.   국제설계공모 추진(도시공간기획담당관)

ㅇ ’21. 12.~ ’22. 10.   서울시립도서관(서대문) 운영방안 용역

ㅇ ’22. 5. 23.         서울시립도서관(서대문) 조성 변경계획 수립

ㅇ ’22.11. 21.        기본 및 실시설계 착수

ㅇ ’23.7. 31.         행안부 타당성 조사 의뢰

□ 향후계획

ㅇ ’22. 11. ~ ’24. 2. 기본 및 실시설계

- 설계사 : ㈜에이플러스 건축사사무소, 대표 김영순 (송파구 소재)

- 용역비 : 금2,117백만원(용역비, 녹색건축·에너지효율·BF인증 비용포함)

ㅇ ’24. 5.~ ’27. 5.	공사 착공 및 준공

별도송부(대용량파일)

1. 설계도안 1부.

2. 공모관련 자료일체(공고문,설계공모지침서,과업내용서,당선작결정 공문,

당선안) 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	문화시설과	문화시설3팀장	최우진
	도시기반시설본부 건축관리과	건축관리과장	조승제
	☎2133-4216	주무관	김한종
	☎6438-2261	주무관	이해경
	작 성 일 :2023.9.7