젊은경제·바른행정·신속성장, 바로 서대문!
		서 대 문 구
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(2회) 시행 [2023년 관내 하수구조물 보수공사(연간단가)]

우리 구에서 시행중인 『2023년 관내 하수구조물 보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2023년 관내 하수구조물 보수공사(연간단가)

2. 공사기간 : 2023.  3. 8. ~ 2023. 12. 31.

3. 공사개요 : 하수관 정비 D=300~1,200mm, L=590m, 빗물받이 설치 208개소 등

4. 도 급 자 : 흥륭종합건설 (대표 : 윤선희)

5. 설계변경 사유

- 예산확보 810백만원(시비262, 특교금548)에 따른 사업비 증액 및 공사현장 여건에 따른 시공물량 변경 등

※ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부예규) 제9장 제6절

□ 발주기관의 필요에 따른 공사 설계변경 (해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생)

6. 설계변경 현황

구 분	당 초 (원)	변 경 (원)	증 ․ 감 (원)
총 공 사 비	1,840,392,600	2,849,000,000	증) 1,008,607,400
도 급 비	1,449,740,000	2,276,661,000	증) 826,921,000
관급자재비	252,996,000	390,062,000	증) 137,066,000
이 설 비	137,656,600	182,277,000	증) 44,620,400

7. 예산과목 (총 예산액: 2,849백만원)

구 분		예 산 명	예산액(천원)	비 고
구 비		하수구조물 보수공사	1,900,000
특별조정교부금		자치구 하수관로 준설 및 빗물받이 정비지원	200,000
		재난재해 대응 복구 사업비 지원	348,000
시 비	로바스 (LOBAS)	빗물유입시설 확충 및 이설	139,000
		노후불량 하수맨홀 정비 (추락방지, 맨홀정비)	262,000
총 계			2,849,000

8. 예산과목별 도급비 구분

구 분		예 산 명	당 초(원)	변 경(원)	증 · 감 (원)
구 비		하수구조물 보수공사	1,318,142,600	1,368,585,870	증) 50,443,270
특별조정교부금 (간주처리 완료)		준설 및 빗물받이 정비	-	200,000,000	증) 200,000,000
		재난재해대응 복구사업	-	348,000,000	증) 348,000,000
시 비	로바스 (LOBAS)	빗물유입시설 확충	131,597,400	139,000,000	증) 7,402,600
		노후불량 하수맨홀 정비	-	221,075,130	증) 221,075,130
총 계			1,449,740,000	2,276,661,000	증) 826,921,000

붙 임 : 1) 설계변경 검토보고 1부.

2) 설계변경 사유서 1부.

3) 설계변경 내역서 1부.

4) 검증확인필 1부.

5) 합의각서 1부.

6) 설계변경심사, 일상감사 등 결과 각 1부.

7) 관련방침서 각 1부.

8) 예산 재배정 공문 각 1부.  끝.

주무관	김환		치수팀장	신문식		치수과장	代신문식		안전건설국장	김태중
부구청장	진경식		구청장	09/08
이성헌
협조자	주무관	양지숙		계약팀장	문혜선		재무과장	하인철
기획재정국장	강환복
시행	치수과-17781	(	2023. 9. 8.	)	접수		(		)
우	03718	서울 서대문구 연희로 248	/	https://www.sdm.go.kr
전화	02-330-1743	/전송	02-330-8945	/	hwankim@sdm.go.kr	/	부분공개(5)