문서번호	급수운영과-15758
결재일자	2023. 9. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
반건모		전동근	09/11
			박종일
협조

『2023년 역삼동 외 4개동  장기사용 배급수관 정비공사』12구간 현장실정에 따른 시공지시 계획 보고

『2023년 역삼동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사』12구간

현장실정에 따른 시공지시 계획 보고

2023. 9.

강남수도사업소

(급수운영과)

『2023년 역삼동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사』12구간

현장실정에 따른 시공지시 계획 보고

우리 사업소에서 시행 중인 『2023년 역삼동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사』12구간에 시공지시 사항이 발생하여 검토 후 아래와 같이 보고드림

☐ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 2023년 역삼동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사기간: ************************

ㅇ 공사개요: *******************

ㅇ 도 급 비: ***********************************

ㅇ 도 급 사: *************

☐ 현    황

ㅇ 구 간 명: 2023년 역삼동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사 -12구간

ㅇ 위    치: ************************

ㅇ 설계개요 및 위치도

- 설계개요: ***********

- 위치도 및 설계도면

*********************

☐ 문제점 및 검토내용

ㅇ 문제점

-『2023년 역삼동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사』12구간의 시점부분기부에 중간밸브가 없어 공사 시 단수구역이 광범위 함

- 단수구역 최소화 및 향후 상수도공사(긴급누수공사, 관개량공사 등)에 따른 시설물유지관리를 위하여 중간밸브(부단수제수밸브) 설치가 필요한 실정임

※ 밸브조절 대상 및 단수구역

****************************************************************

ㅇ 검토내용

- ************* 분기본관에 부단수제수밸브(S-gate) 설치 후 단수구역을 최소화하여 장기사용 배급수관 정비공사(12구간)를 시행하고자 하며, 향후 효율적인 누수대응 및 상수도 시설물유지관리 등 원활한 급수공급에   철저를 기하고자 함

- 공사개요

*********************************************************************************************************************************************************

☐ 향후계획

ㅇ 상기와 같은 현장실정에 따라 서울시설공단에 시공지시하여 정비공사에 철저를 기하고자 하며

ㅇ 향후 설계 변경 시 물량 증⋅감분에 대하여 반영 조치토록 하고자 함.  끝.