문서번호	시설관리과-1967
결재일자	2023. 9. 11.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
임무환		라철흠	09/11
			이유국
협 조
	기획예산과장			이강수
	총무과장			박서영
	주무관			김병수

『한강공원 자전거도로 업그레이드공사』

현장실정 및 집행잔액 사용 계획보고

2023.  9.   .

시   설   부

(시설관리과)

(한강공원 자전거도로 업그레이드공사)

현장실정 및 집행잔액 사용 계획보고

『'23년 한강공원 자전거도로 업그레이드공사』추진중 현장실정 반영 및 집행잔액(이전비 등 낙찰차액)을 활용, 사고 이월을 방지하고 사업추진에  만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2023년 한강공원 자전거도로 업그레이드공사(1,2,3 구역)

○ 공사개요 (해당공원 : 양화, 이촌, 잠원, 뚝섬, 잠실, 강서)

- 1 구역 : 양화(1구간), 이촌(3구간), 잠원(2구간)

· 보행로 분리(정비) 0.98km, 회전교차로 1개소, 쉼터 1개소,

- 2 구역 : 뚝섬(1구간), 잠실(2구간)

· 보행로 분리(정비) 0.39km, 반려동물산책로 0.8km, 회전교차로 1개소

- 3 구역 : 뚝섬(1구간), 잠실(1구간), 강서(2구간)

· 보행로 분리(정비) 1.81km, 쉼터 개선 2개소

○ 사업별 예산 집행현황 및 공정률(%)                    (단위: 천원)

구 분	합 계	1 구역	2 구역	3 구역	비고 (폐기물처리)
*****	*********	*********	*********	*********
*****	*********	*********	*********	*******	*******
*****	*********	*******	*******	*******
*****	*******
***	***	***	***	***

□ 보고내용

○ 현장실정보고

- 이촌 보광나들목 (강변북로 고가 하부): 직립호안(옹벽)으로 보행로 확장 불가(제외)

- 이촌 거북선나루 (띠녹지 조성) : 아트피어 조성부지와 중복(제외)

- 잠실 반려동물산책로(수변산책로) : 연약지반으로 지반보강 필요(공종 추가)

- 세부 내용 및 검토 (붙임:2 참조)

구분	보고내용	조치계획
1구역 (이촌)	-보광나들목 구간 : 보행로 확대 (L=0.5km), 저촉시설(옹벽)로 시공불가 -거북선나루 구간: 띠녹지조성(L=0.15km) 아트피어 조성부지에 포함.	-'24년 추진 공사시행분 옥수역 주변(0.49km)으로 대체시행 -거북선나루 구간 : 추후시행
구역 (잠실)	-반려동물산책로 조성대상지 수변가 산책로(L=0.5km) 연약지반으로 당초 기층(t=20cm) 포설 외 지반 추가보강 필요.	-보강토(식생)옹벽설치 보강시행 ·규모: H=0.5~1.5m, L=0.5km

□ 집행잔액(이전비 및 낙찰잔액) 사용계획(800백만원)

○ 안양천교 구조개선공사 제한된 공기일정으로 진.출입로 설치 (붙임:4 참조)

- 안양천교의 공사추진이 건기(10~5월) 시행됨에 따라 가물막이 및 파일 기초시공이 시급하여, 상류부 진입로(B=6m, L=95m) 등 부대공사 시행.

○ '24년 업그레이드 대상구간 잔여예산 범위내에서 시공 (붙임:3 참조)

- 대상구간 : 난지 젊음의광장주변 보행로분리 및 보도 정비(L=1.39km), 광나루 암사대교 하류 보행로분리 및 보도정비(L=0.65km), 회전교차로 1개소, 쉼터1개소.

□ 행정사항

○ 연내 사업의 원활한 추진을 위해 공정율(70%) 높은 (1구역) 공사에

우선 작업지시 후 설계변경 정산코자 함.

붙임  1). 공사위치도 및 계획평면도(당초) 1부

2). 공사실정보고 현황 1부.

3). '24년 공사대상 선시공 대상지(현황) 1부

4). 공사장 진입도로 설치계획(현황) 1부.

5). 1,2구역 실정보고서 각 1부. 끝.