문서번호	시설보수과-8421
결재일자	2023. 9. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
지종삼		이정국	09/12
			차창훈
협 조
	주무관			박지훈

도림고가 외 1개소 보수공사 실정보고 검토보고 (표면 및 단면보수 추가시행건)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 9.

남부도로사업소

(시설보수과)

「도림고가 외 1개소 보수공사」실정보고 검토 보고

「도림고가」 시설물의 내구성 향상과 도시미관저해에 따른 민원  발생사항 해소를 위한 추가공사시행에 따른 검토 보고임.

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 도림고가 외 1개소 보수공사

○ 공사기간 : 2023.  5. 11. ~  2023. 12. 31.

○ 공사개요 : ****************

○ 도 급 비 : 624,628,880원

○ 시 공 사 : (주) 경원뷰건설 대표 양 신우

○ 예산집행현황

(단위 : 천원)

구 분	총사업비	도 급 비	폐기물 등	계약심사 절감액	집행잔액 (낙찰차액)	비 고
****	*******	*******	*****	*****	******
*****	*******	******	*****	*	******
******	*******	*******	*****	*****	******

□ 실정보고 내용

○ 현안사항

- 도림고가 시설물의 노후화로 상하부 균열, 열화 및 박리 등의 발생으로 도시미관 저해에 따른 민원발생.

- 구조물의 안전성향상을 위한 긴급보수 및 지역환경개선을 위한   추가 보수구간이 다수 산재하고 있는 실정임.

○ 검토내용

• ***************

******************************************

***************************

**********************************

**********************************************

*******************************

***************************************

○ 전경사진

*	*
****************	***************************
*	*
***************************	***************************
*	*
**********************	**************************

○ 추가분 주요 공종 및 개략공사비

공 종	규 격	단 위	수 량	비 고
****	*****	*	****
****	******	*	*****
****	******	*	****
*****	*****	*	*
*******			***********
*********			***********
*********			***********

□ 조치계획

○ 상기사항은 시설물의 안전성확보와 기능향상 및 쾌적한 도로환경  조성을 위해 필요한 사항으로

○ 원활한 공사 추진을 위하여 *******************************************하여 예산의 범위내에서 보수토록 우선 작업지시하고 추후 정산반영하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 추가분 내역서 및 도면 각 1부.

2. 사진대지 1부.  끝.