문서번호	기전과-9694
결재일자	2023. 9. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
이정은		채충일	09/12
			차창훈
협조
	주무관		이태근

『2023년 교통사고 잦은곳 개선사업 교통신호기 공사』

낙찰차액 사용계획 및  설계변경 검토보고

2023. 09.

남부도로사업소

[기 전 과]

『2023년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사』

낙찰차액 사용계획 및 설계변경 검토 보고

2023년 교통사고 잦은 곳 공사 관련 경찰청 추가 규제 및 교통운영과 요청 사항 등의 물량증가로 예산 부족이 예상되어 계약심사잔액 및 낙찰차액을 사용해 설계변경 하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 행정안전부 예규 제75호(2019. 5. 28.)

○ 제3장 14조 시설비 및 부대비 사용: 동일 편성목 내의 낙찰차액 사용가능

□ 교통운영과-12318(2023.8.18.)

○ 시설공사 협조요청(교통사고 잦은 곳 개선)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 예산배정현황 : 784백만원

○ 도급비 510백만원, 관급비 140백만원, 이설비 134백만원

□ 사업계약현황

사 업 명	2023년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사
구 역	제1구역	제2구역
사업위치	금천구 등	동작구, 서초구
발주금액	297,699,000원	209,700,000원
계약금액	261,840,059원	184,712,900원
설계변경(1차)	284,240,000원	-
계약업체	(주)선광티앤에스 조준호	(주)탑성천 천안수
계약기간	‘23. 8.14. ~ 11.15.	‘23. 8.14. ~ 11.15.
책임감리원	서울시설공단 이동훈감독관	서울시설공단 엄세진감독관

Ⅲ		예산집행현황

□ 도급비

(단위 : 백만원)

예산재배정액 (A)	구 분	계약심사 요청금액 (B)	발주 금액 (C)	계약 금액 (D)	계약심사 잔액 (E=B-C)	낙찰 차액 (F=C-D)	설계 변경 추가 금액 (G)	지출 가능 금액 (J=E+F)	비고
510 백만원	소 계	510	508	447	2	61	23	63
	도급비 (1구역)	299	298	262	1	36	23	37
	도급비 (1구역)	211	210	185	1	25	-	26

○ 지출가능금액(계약심사잔액+낙찰차액)

금63백만원

○ 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화(교통사업 특별회계), 교통사고 잦은 곳 개선, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		보고자의견

□ 설계변경 증액(23백만원)을 낙찰차액 중 지출가능금액(63백만원)에서 사용하여, 경찰청 추가 규제 및 교통운영과 추가공사분(명수대한양아파트)등에 반영하여 설계변경 시행코자 함.

□ 설계변경 예정금액

구 분	설 계 변 경 금 액			비 고
	당 초	변 경	증·감 액
제1구역	261,840,059원	284,240,000	증22,399,941	명수대한양 아파트 반영
제2구역	184,712,900원	-	-
계	446,552,959	284,240,000	증22,399,941

Ⅴ		향 후 계 획

□ 2023. 09. : 설계변경 시행(기전과→관리단속과)

□ 2023. 09. : 작업지시(추가)

□ 2023. 11. : 공사준공

붙임:  1. 시설공사 협조 요청  1부
2. 설계변경내역서 1부  끝.