아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	변경 계약의뢰(동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사 외 1건)

1. 시설건설과-8694(2023. 9. 8)호 관련 우리부서에서

2. 우리 부서에서 시행 중인 「동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사 외 1건」에 대하여 아래와 같이 변경 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

공 사 명	동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사	목동교~도림천 간 장기사용 송배수관 정비공사
도 급 비	3,950,287,000원	5,032,896,000원
규 모	D=1,200mm, L=1,991m	D=1,000mm, L=2,376m
공사기간	'22. 8 .26 ~ '23. 10. 7	'22. 8. 31 ~ '23. 12. 13
계약상대자	***********	***********, ************
공사감독	********************	******************

나. 계약변경 내역

구분		동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사	목동교~도림천 간 장기사용 송배수관 정비공사
도급액	당초	3,950,287,000원	5,032,896,000원
	변경	3,950,287,000원	5,032,896,000원
공사기간	당초	'22. 8. 26 ~ '23. 10. 7	'22. 8. 31 ~ '23. 12. 13
	변경	'22.8.26~'24.5.6 (211일 연기)	'22.8.31~'24.5.27 (166일 연기)
연기사유		공사전 인·허가 사항 지연에 따른 공사지연 등	철새보호구역내 공사중지 요청에 따른 공사지연 등
귀책소재		계약상대자 귀책없음	계약상대자 귀책없음
지체상금 부과여부		미부과	미부과

다. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비, 시설비(장기사용송배수관 정비)

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 설계변경 합의서 각 1부.  끝.

	시 설 건 설 과 장
주무관	박종혁		시설건설과장	전결 09/12
代강은영
협조자
시행	시설건설과-8776	(	2023. 9. 12.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1), 4층 시설건설과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1491	/전송	02-3146-1529	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	부분공개(7)