현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
	성 북 구
수신	내부결재
(경유)
제목	「한천로80길 일대 외 5개소 하수관로 개량공사」설계변경(1회, 최종) 시행

우리 구에서 시행 중인 「한천로80길 일대 외 5개소 하수관로 개량공사」 설계변경(1회, 최종)을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 한천로80길 일대 외 5개소 하수관로 개량공사

2. 공사기간 : 2023.04.14. ~ 2023.10.15.

3. 도 급 자 : 원하건설(주) 대표 박준상

4. 감 리 자 : (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 대표 오승교

5. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감 현황		비 고
총 공 사 비	735,364,000	756,302,400	증)	20,938,400
도 급 비	554,494,000	582,989,000	증)	28,495,000
관 급 비	106,670*000	110,648,400	증)	3,978,400
이 전 비	74,200,000	62,665,000	감)	11,535,000

5. 설계변경 사유 : 별첨

6. 예산과목 : 물재생계획과, 하수시설 관리, 하수관로 신설개량, 한천로80길 일대 외 5개소 하수관로 개량, 시설비(재배정, 공기업하수도사업특별회계)

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율검증확인서 1부.

4. 관련방침서 1부.  끝.

주무관	황주성		치수담당	오강일		치수과장	김윤기		건설교통국장	09/13
김석우
협조자	주무관	이인규		계약담당	조은숙		재무과장	김성동
시행	치수과-15794	(	2023. 9. 13.	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168, 10층 치수과	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3625	/전송	02-2241-6563	/	wntjd3825@sb.go.kr	/	부분공개(5)