문서번호	자치경찰협력과-8289
결재일자	2023. 9. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	생활안전팀장	자치경찰협력과장
조광재	이용길	09/14
		조재광

2022년 범죄예방인프라 구축사업 결과보고

2023. 9. 14. (목)

자 치 경 찰 위 원 회

(자치경찰협력과)

2022년 범죄예방인프라 구축사업 결과보고
’23. 9. 14.(목)	자치경찰협력과장 :조재광☎2133-9831 생활안전팀장 : 이용길☎9847 담당 : 조광재☎9848

2022년 범죄예방인프라 구축사업을 통해 3개 대상지(강북구‧관악구‧구로구) 주거환경을 개선하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진근거

ㅇ 서울시 자치경찰사무 및 자치경찰위원회의 조직·운영 등에 관한 조례 제2조(자치경찰사무의 범위)

ㅇ 서울시 범죄예방을 위한 도시환경디자인 조례 제9조(방범시설 등 설치 지원)

ㅇ 서울시 사회문제해결디자인 조례 제3조, 제9조(적용범위, 재원확보)

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 범죄예방 인프라 구축사업

ㅇ 사업기간 : ’22년 3월 ~ ’23년 7월

ㅇ 사업대상 : 강북구 수유3동, 관악구 신림동, 구로구 구로2동

ㅇ 사업내용 : 1인가구 밀집지역에 생활안심디자인을 적용한 범죄예방 인프라를 구축하여 안전한 주거환경 조성

ㅇ 소요예산 : 518,000천원

- 기본설계비 : 173,000천원 (디자인정책관)

- 실시설계 및 시공비 : 345,000천원 (자치경찰위원회)

구분	업체명	과업내용	사업비	비고
실시설계	********	*********	********	***** **********
시공	*******	******	*********

Ⅱ		추진 경과 및 실적

□ 추진 경과

ㅇ 사업 공모 및 선정                           : ’22. 3. ~ 4.

사전공모 (3.7. ~ 3.25.)		*********************************
	********		******************************************************************
			******************************************
서류심사 (4.1.)		********************
	********	******************************************************************
		***********************************************************************
현장심사 (4.4. ~ 4.8.)		******************
		**		****	******
	********	*		***	***************
		*		***	***************************
		*		***	*************************

ㅇ 기본설계 실시(市 디자인정책담당관)                   : ’22. 4. ~ 9.

- 중간보고회(5. 31.) 및 워크숍(7. 8.) 실시

- 생활안심디자인 자문단 회의 개최(8. 3.)

ㅇ 실시설계 용역 실시                             : ’22. 9. ~ ’23. 3.

- 대상지별 현장‧물리조사 실시, 마스터플랜 수립

- 사업대상지별 하반기 간담회 개최(9.15. ~ 10.7.)

- 주민동의서 징구(’22. 12. ~ ’23. 2.)

ㅇ 시설물 설치공사 계약의뢰(자경위 → 재무과)     : ’23. 3. 7.

- 계약(4. 12.) 및 공사 착수(4. 17.)

ㅇ 시설물 설치공사 실시                        : ’23. 4. ~ 7.

- cctv 시인성 강화 폴대 도색 및 LED 안내판 설치             : ’23. 5.

※ ▴관악(5. 1. ~ 13.) ▴구로(5. 15. ~ 20.) ▴강북(5. 22. ~ 26.)

- 빛등, 센서등, 모서리거울, 쪽방현관 시스템 등 시설물 부착    : ’23. 6.

- 추가 공사* 실시                                            : ’23. 7.

* ▴구로(쪽방현관시스템 23개소) ▴강북(쪽방현관시스템 4개소, 필로티주차장 센서등 1개)

□ 추진 실적

ㅇ 대상지별 설치 시설물 종류 및 수량

시설물 종류	시설물 수량(개소)
	강북구	관악구	구로구	합계
*********	*	*	*	*
***************	*	*	*	**
*************	*	*	*	*
********	**	**	*	**
**	*	**	*	**
************	*	*	*	*
********	**	*	**	**
***********	**	**	**	**

ㅇ 현장 사진

***********************************************************************************************

Ⅲ		사 업 평 가

□ 사업 총평

**************************************************************

***********************************************

***************************************************

************************************************************

□ 향후계획

ㅇ 사업대상지 주민 인식변화 설문조사 실시         : ’23. 9. 11. ~ 22.

ㅇ 시설물 유지관리(자치구)                          : ’23. 9. ~

붙임  1. 2022년 범죄예방인프라구축 사업 설계내역서 1부.

2. 강북구(수유3동) 마스터플랜 1부.

3. 관악구(신림동) 마스터플랜 1부.

4. 구로구(구로2동) 마스터플랜 1부.  끝.