문서번호	공원시설과-2289
결재일자	2023. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
유재우		양돈욱	09/14
			허현수
협 조
	주무관			이정규

『잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성사업』

전기공사 설계변경 검토 보고

2023. 9.

공   원   부

(공원시설과)

『잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성사업 』

전기공사 설계변경 검토 보고

우리 본부에서 시행중인 『잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성사업』전기공사에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함

공사개요

○ 공 사 명 : 『잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성사업』 전기공사

○ 공사기간 : 2022. 3. 2. ~ 2023. 11. 30.

○ 도 급 비 : ************

○ 계 약 자 : ***************

설계변경 내용

○ 계약금액 변경

(단위 : 원)

구 분		공 사 비		증 감
		당 초	변 경
총 공 사 비		***********	***********	**	**********
도급액	공급가액	***********	***********	**	***********
	부가세	**********	**********	**	**********
	계	***********	***********	**	***********
관 급 자 재		***********	***********	**	***********

○ 주요 설계변경 사항

- 조명용 전원케이블(PNCT) 시공방식 변경

- 전력간선공사 관련 물량 변동

- 2차 전력간선 굵기 변경 및 옥외분전반 보호 펜스 설치

- 조명기구(TL1, OL1) 배선 및 관련 물량 변경

○ 변경내용

공 종	규 격	단 위	수 량		변경사유
			당 초	변 경
*******************	*****	*	*****	*	공원시설과-3717호('23. 5. 30.) 관련 실정보고 사항 반영
*******************	*****	*	***	*
***********	**** *****	*	*	*****
***********	**** ******	*	*	***
***********	**** ******	*	*	***
*********	****	*	*	*****
*********	****	*	*	*****
*********	****	*	*	***
*********	****	*	*	***
*********	*****	*	**	***
*********	*****	*	*	***
**********	*******	*	*	*****
*********	******** **********	*	*****	*****
**********	***********	*	*	*
***	****	*	*****	*****
****	****	*	*****	*****
**	***********	*	*	*
*********	*********	*	*****	*
*********	********************	*	**	**
***********	********	*	*****	*
******	*************	*	*	*

○ 예산과목

- 미래한강본부 공원시설과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리   및 개선, 잠실 자연형 물놀이장 조성, 시설비 및 부대비, 시설비

보고자의견

○ 현장여건에 따른 물량변경 등 실정보고 사항을 반영하여 설계변경 하고자 함.

붙임  1. 『잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성사업』전기·통신공사 실정보고서 1부.

2.  설계변경내역서_잠실한강공원 자연형 물놀이장 조성 전기공사 1부.

3.  검증확인서 1부.

4.  최종 공사비 산출 1부.  끝.