등록번호	건축과-29751		주무관		공공건축팀장		건축과장		도시관리국장
			김도형		정영진		김혜경		전결 09/14
결재일자	2023. 9. 14.
									김용배
공개구분	부분공개(5)
			협조	주무관		이현우
				행정지원팀장		김정희
				행정지원과장		김영혜
				행정관리국장		위상복
구청사 환경개선 공사(건축·기계) 발주계획
도시관리국 건축과

구청사 환경개선 공사(건축·기계) 발주계획

구청사 환경개선을 위한 실시설계가 완료됨에 따라 공사를 발주하여 조속히 사업을 추진하고자 함

Ⅰ		추진근거

❍ 구청사 환경개선 공사 추진계획

[행정지원과-14974호(2023. 3. 30.)]

❍ 구청사 환경개선 공사 설계용역 및 공사 발주 의뢰

[행정지원과-16361호(2023. 4. 15.)]

Ⅱ		공사개요

❍ 공 사 명 : 구청사 환경개선 공사(건축·기계) ※주관부서 : 행정지원과

❍ 공사내용

- 본관 지상1~7층 남녀 화장실 14개소 시설 개선

- 본관 지상7층 대강당 시설 개선

❍ 위    치 : 중구 창경궁로 17, 중구청 본관 지상1~7층

❍ 예 산 액 : 1,740,000천원 (전액구비)

- (설계비) 52,247천원

※ 설계사/용역기간 : 공명 건축사사무소 / 2023.5.3. ~ 2023.8.21.

- (공사비) 1,511,270천원 ※(도급비)1,425,949천원, (관급비)82,921천원

❍ 추진경위

- 2023. 3. 30. : 사업 추진계획 수립(행정지원과)

- 2023. 4. 15. : 설계 및 공사 의뢰(행정지원과→건축과)

- 2023. 5.   3. : 설계용역 발주

- 2023. 8. 21. : 설계용역 완료

- 2023. 9.   8. : 계약심사 및 일상감사 요청(건축과→감사담당관)

Ⅲ		발주계획

❍ 공사기간 : 착공일로부터 150일('23.10월 중순 ~ '24.2월 말)

❍ 공 사 비 : 금1,511,270천원(금일십오억일천일백이십칠만원)

(단위 : 원)

구 분	건축·기계	폐기물 처리	재해예방기술지도	합 계
도급액	1,378,061,000	47,888,000	2,400,000	1,428,349,000
관급액	82,921,000	-	-	82,921,000
합계	1,460,982,000	47,888,000	2,400,000	1,511,270,000

※ 전기·소방 공사 분리발주 예정(법적 분리발주 대상 공사), 감리용역 별도 발주 예정

❍ 계약방법

- 건축·기계 : 제한입찰(지역)

- 폐기물 처리·재해예방기술지도 : 1인견적 수의계약

❍ 입찰참가자격(건축·기계)

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제13조의 자격요건을 갖추고, 「건설산업기본법」 시행령 [별표1]의 ‘건축공사업’ 등록을 필한 자로서 주된 사업소가 입찰공고일 전부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 계속하여 서울특별시에 소재한 업체

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제13조의 자격요건을 갖추고, 「건설산업기본법」 시행령 [별표1]의 ‘실내건축공사업’, ‘금속·창호·지붕·건축물조립공사업’, ‘도장·습식·방수·석공사업’, ‘기계설비·가스공사업’ 등록을 필한 자로서 주된 사업소가 입찰공고일 전부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 계속하여 서울특별시에 소재한 업체

❍ 예산과목 : 행정지원과, 신바람나는직장분위기조성, 쾌적한근무환경유지, 청사유지관리, 시설비및부대비

Ⅳ		향후일정

❍ 2023.  9월 3주 : 공사발주 시행

❍ 2023. 10월 : 공사 착공

❍ 2024.  2월 : 공사 준공

붙임  1. 사업 추진계획 방침서(행정지원과) 1부.

2. 내역서 및 산출서 각 1부.

3. 도면 및 시방서 각 1부(건축도면 용량초과로 별도 보관).  끝.