문서번호	도심재창조과-8458
결재일자	2023. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도심재창조정책팀장	도심재창조과장
송창선		박세진	09/14
			정회원
협조

「녹지생태도심 시범사업」

다동공원 조성 설계용역 추진계획

2023. 9.

균형발전본부

(도심재창조과)

「녹지생태도심 시범사업」

다동공원 조성 설계용역 추진계획

공공先투자 後회수 제도도입 및 녹지생태도심 시범사업으로 추진중인 다동공원 조성사업과 관련, 기본 및 실시설계 용역을 추진하고자 함

Ⅰ				추진근거 및 개요		‘

□ 추진근거

ㅇ「공공先투자 後회수」제도도입 및 시범사업계획 (행정2부시장방침 제188호)

□ 추진경과

ㅇ ’22.11.03.  기본계획용역 (’23.9.1. 완료)

ㅇ ’22.12.01.  타당성 조사 (’23.6.30. 완료, 한국지방행정연구원)

ㅇ ’23.05.25.  도시재생인정사업 도시재생위원회 심의 (원안가결)

- 다동공원 조성사업을 도시재생사업으로 인정

ㅇ ’23.08.16.  무교다동 정비계획 변경(안) 도시계획위원회 심의 (원안가결)

- 다동공원 세분 변경(소공원→근린공원), 공공공지 소단위관리지구 지정

ㅇ ’23.08.18.  투자심사  ****************************

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 중구 다동 33-5 일대

ㅇ 면    적 : 6,166.2㎡ (공원 3,936.2㎡ + 도로 2,230㎡)

***************************

******************************

*************************************************

*******************

***************************************

ㅇ 사업기간 : ’22. 7. ~ ’25.12.

Ⅲ				추진계획		‘

□ 용역목적

ㅇ 무교다동 도시정비형 재개발구역 내 장기미확보 다동공원 및 주변 도로를 녹지생태도심 시범사업으로 조기에 조성하여 정체된 정비사업 활성화를 유도하고 쾌적한 기반시설 제공으로 시민편익 증진

ㅇ 장기미조성 정비기반시설을 미래 비전을 제시하는 '서울형 도심공원'으로 조성하여 녹지생태도심 재창조 정책의 개방형녹지의 표준모델 제시 및 시민 체감효과 제고를 위한 설계용역 시행

□ 용역개요

*************

***********************

*****************************

**********************************************

- 과업내용

‣ 현지조상 및 답사, 자연환경, 인문환경, 유사사례 분석, 종합분석, 공간 배치구상 등

‣ 기반설계, 식재설계, 시설설계, 포장설계, 공사비 산출, 보고서, 기본 및 실시설계 도서 등

********************

**********************

**********************

*****************************

**********************************************

- 과업내용

‣ 재해영향성 검토 대상지역 설정, 기초현황 조사, 재해영향예측 및 평가, 예상재해 저감대책 수립 및 저감방안 반영, 유지관리계획, 검토서 및 기타 관련 자료 작성 등

********************

□ 시행방법

ㅇ 용역구분 : 기술용역

ㅇ 계약방법 : 일반경쟁입찰 (협상에 의한 계약)

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조

ㅇ 추진절차

입찰공고	⇨	입찰등록 및 제안서 제출	⇨	제안서 평가	⇨	협상대상자 선정 및 통보	⇨	협상 및 계약체결

ㅇ 제안서 평가방법 : 제안서 평가계획 별도 수립 후 시행

- 협상 적격자 선정 및 협상순서 : 종합평가점수 70점 이상 제안자

※ 소규모 재해영향평가 용역은 수의계약 시행(지방계약법 시행령 제25조)

□ 소요예산

********************

**********************************************

Ⅳ				향후계획		‘

***********************************

****************************************

***********************************

**********************

붙임 : 설계내역서 2부.  끝.