문서번호	급수운영과-15312
결재일자	2023. 9. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
장승화	代신승무	09/15
		이규희

급수공사 작업기간 연기 보고(개량 25)

2023.  9.

강동수도사업소

(급수운영과)

급수공사 작업기간 연기 보고(개량-25)

풍납동 외 11개동 상수도공사(연간단가) 업무 수행 중 급수공사 작업기간 연기 신청서가 접수되어 다음과 같이 보고드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사

○ 공사기간: 2023. 6. 15.~2024. 6. 30.

○ 계약금액: ************

○ 계약업체: ***************

□ 접수내역

○ 급수공사 현황

연번	지시번호	주 소	수요가	당초	변경	비고
*	*****	***********	***	*********** ~ ************	*********** * ************

○ 연기사유: 작업지시 관련, 풍납동 일원 앵글밸브 교체공사를 진행하려면 새들분수전을 잠겨야 하는 과정에서 송파구(문화재연구소 등)의 문화재 현상변경 허가를 득하여야 하나, 해당 기관과 협의 지연으로 작업이 불가능하여 연기를 신청함

□ 지연배상금 부과 여부

○ **********************************

□ 조치사항

○ *********************

붙임  공사 작업기간 연기신청서 1부(별첨).  끝.