아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시데이터센터
수신	내부결재
(경유)
제목	조달구매 물품 납품기한 연장 조치(데이터센터 노후 UPS교체 사업)

1. 기획관리과-8879(2023. 9. 14.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진 중인 『데이터센터 노후 UPS 교체사업』에 소요되는 관급자재에

대하여 아래와 같이 납품기한 연장 조치하고자 합니다.

가. 구매내역

ㅇ 계약번호 : 00-21-7-0077-04

ㅇ 납품요구번호 : 12-23-2-25218-00

ㅇ 품    명 : UPS (무정전전원장치 39121011)

*****************************

**********************************************************

나. 연장사유 : 2024년으로 UPS 교체 일정이 연기되었는바 교체 일정에 맞추어 납품

기한 연장

다. 계약 변경내용

ㅇ 계약금액 : 변경없음

ㅇ 귀책사유 : 서울특별시 데이터센터

ㅇ 지체상금 부과여부 : 미부과

ㅇ 납품기한 변경

- 당초 : 2023. 10. 31.

- 변경 : 2024.  3. 31.

붙임  1. 납품기한 연장 검토보고서

2. 납품기한 연기의뢰서

3. 합의각서

4. 분할납품요구서.  끝.

주무관	김석광		주무관	소순선		기획관리과장	09/15
조윤홍
협조자
시행	기획관리과-8917	(	2023. 9. 15.	)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 49, 서울특별시 데이터센터 4층 기획관리과	/	seoul.go.kr
전화	02-3470-1491	/전송	02-3470-1544	/	ksk2050@seoul.go.kr	/	부분공개(5)