문서번호	도로보수과-9453
결재일자	2023. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
박해웅		09/15
		신준식
협조

공사 설계변경 검토 보고(제1회)

[2023년 도로 굴착복구공사(연간단가)]

2023. 9. 14.

동부도로사업소

(도로보수과)

공사 설계변경 검토 보고(제1회)

[2023년 도로 굴착복구공사(연간단가)]

우리 사업소에서 시행중인 『2023년 도로 굴착복구공사』와 관련, 공종별 물량증·감에 따른 설계변경(제1회) 사항에 대한 검토결과를 보고드림.

	1		추진 현황

○ '23년 도로굴착복구기금(직접복구비) 재배정 알림(도로관리과-3452호, ’23.02.21.)

○ '23년 도로 굴착복구공사 발주계획(도로보수과-1866호, ’23.02.22.)

○ 선금지급 알림(관리단속과-5106호, ’23.04.18.)

○ 제1회 기성 검토보고(도로보수과-6169호, ’23.06.21.)

○ 설계변경(제1회) 검토보고(건설사업관리 23-321호, ’23.06.14.)

	2		공사 개요

○ 공 사 명: 2023년 도로 굴착복구공사(연간단가)

○ 공사기간: 2023. 4. 4. ~ 2023.12.26.

○ 공사개요: 굴착복구 108a, 표층확폭복구 26a 차로단위복구 600a

○ 공사금액: ****************************************************

○ 시 공 자: ******************************

	3		설계변경 내용

○ 변경사유: 도로점용(굴착복구) 허가신청 증감에 따라 기 계약된 공종의 물량증·감을 반영, 재배정된 예산범위 내에서 물량조정(증·감) 시행

○ 공종별 수량변경 내역

구분	공 종	수 량 변 경 내 역			금액변경내역 (천원)
		당초	변경	증·감
굴착복구	*****	******	******	**********	**********
표층확폭복구	****	******	******	**********	**********
차로단위복구	****	******	******	**********	**********

○ 설계변경 현황

(단위:원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 · 감 금 액	비고
*		*************	*************
***	****	*************	*************	*****
	*****	***********	***********	*****
	**	*************	*************	*****
*****		*************	*************	*****
******		*********	*********	*****

	4		조치계획

○ 당해 공사의 건설사업관리자로부터 제출된 설계변경 내용이 적정하므로 설계변경 및 재계약 시행코자 함.

○ 예산과목

********************************************************************

붙임 1) 설계변경 검토보고서(건설사업관리) 사본 1부.

2) 설계변경 내역서 각 1부.  끝.